문서번호	기전과-1465
결재일자	2017.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	03/21 이덕기
협조

도로조명시설 세척 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 3

남부도로사업소

(기  전  과)

도로조명시설 세척 시행계획

차량 매연 및 미세먼지 등으로 오염된 도로조명시설(터널․지하차도, 가로등)에 대한 봄맞이 등기구 세척을 시행하여 쾌적한 도시환경 유지에 만전을 기하고 함.

□ 시설현황

구 분		터 널	지하차도	가로등	기타
대 상	44개소	6개소	10개소	27개소	1개소
총 수량	7,119등	2,988등	2,431등	1,592등	108
세척대상	6,194등	2,691등	1,840등	1,555등	108

※기타 : 여의상류IC 교차로

□ 세척기간 : 2017. 3. 27 ~ 5. 17

○ 가    로    등  : 2017. 3. 31 ~ 4. 11

○ 터널․지하차도 : 2017. 4. 14 ~ 5. 17

□ 세척 시행방향

○ 터널․지하차도, 가로등 등기구 세척은 연1회(상반기) 실시

○ 가로등(1차) 우선 세척 후, 터널․지하차도등(2차) 세척 시행

- 터널ㆍ지하차도 등기구 세척은 시설물(벽면ㆍ천정) 세척작업 이후 실시

○ 조명 개선으로 양호한 조명시설 세척 제외

- 호암1터널, 영등포, 동작, 사평 지하차도, 터미널고가 가로등

○ 2017년 조명개선공사 지역 세척 제외

- 잠수교남단 지하차도 및 가로등

○ 터널 및 지하차도의 보도등 세척 제외

□ 안전관리방안

○ 작업인원 및 장비

- 작업자 : 12명(작업자4명, 운전4명, 보조 2명, 유도원1명, 작업소장1명)

- 장  비 : 고소작업차 2대, 유도차량 2대, 라바콘 50개, 안내표지판 4개

○ 교통안전시설물(표지판) 및 교통신호요원(유도원) 배치

○ 작업차량 차선변경 시, 라바콘등 안전장치를 사전에 설치하여 차량 유도

○ 안전교육시행 철저 이행지시

- 작업전 안전물품, 안전장구 착용 점검

- 차량통제 철저 등

○ 관할 경찰서에 교통통제 협의 및 교통방송에 교통통제 일정 홍보

○ 안전시설 설치 강화

- 일반도로 : 세척작업 시점부에 싸인보드카(1~2대) 및 안내간판 추가 설치로 운전자 감속운행 유도 및 작업자 안전 공간 확보

- 터널ㆍ지하차도 : 시설물 입구에 싸인보드카, 안내간판을 설치하고 시설물 내에 작업구간 앞에도 싸인보드카 1대를 추가 설치하여 작업자 안전 공간 확보

안전시설 설치 강화

일반

도로

대기차량

다목적차량

작업차량

싸인보드카1~2대

세척작업중

부도로사업소

50m이상

완충구간

(20m이상)

완화구간

(80m이상)

주의구간

(150m이상)

작업구간

(50m이내)

100m이상

터널ㆍ지하차도

100m이상 50m이상

세척작업중

부도로사업소

완충구간

완화구간

작업차량

싸인보드카

지하차도, 터널구간

싸인보드카

작업구간

주의구간

□ 교통 통제계획

○ 교통통제 협의

- 관할 경찰서에 교통통제 사전 업무 협의

- 교통방송에 터널, 지하차도 교통통제 일정 홍보 요청

○ 작업시간

- 주간 : 10:00 ~ 17:00

- 야간 : 23:00 ~ 익일 05:00

○ 교통통제 방법

- 1개 차로 통제 후 작업

- 세척현장에 세척(공사)안내표지판 부착

- 세척작업차량 50m 전방 라바콘을 이용한 차선변경 유도

- 세척현장에 차량유도요원 배치, 차량의 원활한 흐름 유도

□ 행정사항

○ 2017년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업지시

- 가로등 세척(1차 작업지시)

- 터널․지하차도등 세척(2차 작업지시)

○ 작업시행 전, 세척일정표 및 안전관리계획서 징구

○ 등기구의 오염도 및 날씨 등을 감안하여 환경정비(세척) 시행

붙임 :  도로조명시설 세척 대상 1부.  끝.