투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 서부공원녹지사업소 질서유지관리용역 설계변경 시행

1. 공원운영과-5232(2014.3.28)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 2014년 서부공원녹지사업소 질서유지관리용역에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행 하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 서부공원녹지사업소 질서유지관리용역

나. 계약기간 : 2014. 3. 1. ~ 2015. 2. 28. (12개월)

다. 계 약 자 : ㈜다보산업관리 (대표 정채열)

라. 설계변경 내용

구 분		변 경 전	변 경 후	증 감
계 약 금 액		542,508천원	614,315천원	증 71,807천원
계 약 기 간		2014.3.1~2015.2.28		변경 없음
근무 인원	주간	690명	-	-
	야간	5,146명	6,084명	증 668명
	심야	226명	244명	증 18명

마. 산출내역 : 금71,807천원

- 서서울호수공원 : 104,197원×334일×2명 = 69,604천원

- 노을캠핑장     : 122,413원 × 18일× 1명 =  2,203천원

바. 설계변경사유

- 서서울호수공원내 심야 시간대 능골산 산불예방 순찰과 화장실 시설물 파손 및 임야 등 우범지역에서 노숙 및 음주, 흡연 등으로 시민이용객의 안전을 위한 질서유지용역 근무자 배치필요

- 노을캠핑장 조기개장에 따른 심야 시간 근무자 배치필요

사. 추가 소요예산

- 예산금액 : 71,807천원

- 예산과목 : 서부공원녹지사업소운영, 서부공원녹지시사업소 산하공원 유지관리, 일반운영비,

공공운영비(월드컵공원 질서유지용역)201-02

※ 예산집행잔액 활용(확보예산-618,000천원)

아. 시행일자 : 2014. 4. 1.

붙 임 : 1. 2014년 질서유지관리용역 과업 및 설계변경 방침서 1부

2. 2014년 질서유지용역 과업지시서 1부

3. 2014년 질서유지관리용역 설계 변경내역서 1부.  끝.

주무관							안현웅				주무관					이일광					주무관					이수환					총무팀장						조기환
공원운영과장							조준수				서부공원녹지사업소장					03/31 신시섭
협조자
시행			공원운영과-5316										(						)		접수												(						)
우	121-250					서울 마포구 월드컵로 243-60(마포구 성산동 390-1)																/			http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화		02-300-5525							/전송			02-300-5527					/	atsign@seoul.go.kr													/	부분공개