문서번호	배수과-2374
결재일자	2017.3.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	배수과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
김진성	이병운	이규상		03/21 구아미
협 조

’17년 공원 아리수 음수대 설치 계획

2017.  3.

상수도사업본부

(급 수 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

’17년 공원 아리수 음수대 설치 계획

시민이 많이 찾는 공원 등에 아리수 음수대를 설치하여 편리하게 마실 수 있는 아리수 음용 환경을 조성하여 음용률 향상에 기여하고자 함

□ 서울시 공원 음수대 설치 현황

구 분		공원 관리부서 설치		상수도사업본부 설치 (2008～2013년)
공원 합계	음수대 합계	공원	음수대	공원	음수대
790개소	1,274대	625개소	1,097대	165개소	177대

□ 2017년 설치계획

❍ 설치대상 : 공원음수대 설치 30대

❍ 사 업 비 : 750백만원

❍ 사업소별 설치대상

(단위 : 백만원)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남
공원 (개소)	30	4	3	6	1	5	8	3
음수대 (대)	30	4	3	6	1	5	8	3
예 산	465	40	45	105	10	95	125	45

- 설치되는 음수대 디자인

Drop Plop(8대)	퓨어:無(11대)	Running Water(11대)

※ 디자인은 구청 등 공원관리부서에서 선정하여 신청함

❍ 추진 일정

- ’17. 4. ~ 6.  : 현장조사 및 기존 음수대(Running Water) 설치

- ’17. 4. ~ 8.  : 음수대(Drop Plop, 퓨어:無) 제작 및 설치

□ 예산 집행 계획

❍ 배관 공사비(30대), 기존 음수대(11대) 설치비 : 465백만원

- 수요처(자치구 등)에서 조기 설치 등을 원하는 장소에는 수도사업소에서 기존 음수대(Running Water)를 구매하여 설치(조달구매)

❍ Drop Plop(8대), 퓨어:無(11대) 제작・설치비 : 285백만원

- Drop Plop, 퓨어:無는 본부에서 일괄 제작구매하여 사업소에서 설치

□ 공원 음수대 설치기준

❍ 음수대 설치기준

- 수돗물 사용량이 계측될 수 있도록 계량기 이후에서 분기・공급되어야 함

- 음수대 설치 후 청소 및 유지관리를 할 수 있는 자치구 등 공원관리부서가 있어야 설치 가능

❍ 현장조사 주요 조사내용

- 음수대 배관연장 : 수도계량기에서 음수대까지 배관은 STS 20~25㎜관으로 수도사업소에서 배관

- 음수대 설치위치 : 공원 내 시민통행이 많은 곳에 관리부서와 협의하여 설치

❍ 현장조사 시 유의사항

- 음수대 담당은 반드시 기전팀과 합동 조사하여 음수대 내부에 설치되는 냉각기 등 전기공사가 이루어질 수 있도록 할 것

- 아리수 음수대는 직결급수로 음용할 수 있도록 배관 설계

- 해당기관의 시설물 책임자와 합동조사하여 음수대 위치 선정 등을 협의

- 음수대 설치 지점은 화장실 주변이나 자전거 보관소 등 음용환경이 좋지 않은 곳은 피하여 설치

- 음수대 설치 완료 후에는 공원관리부서에 관리전환 후 준공처리

□ 행정 사항

❍ ’17년 아리수 음수대 설치 실적 보고

- 공원음수대 설치 실적을 매월 5일까지 보고

❍ 음수대 설치 완료 후 GIS에 현황자료 입력

- 공원음수대 설치 현황을 GIS에 입력하여 관리

❍ 자치구 등 공원관리부서에 물품관리전환 실시

- 음수대 설치 완료 후 ‘물품관리전환 합의서’, ‘음수대 관리카드’, ‘음수대 관리 매뉴얼’을 대상기관에 송부

❍ 음수대 설치 사업 예산이 조기에 집행될 수 있도록 사업소별 예산 배정

붙임 : 2017년 사업소별 음수대 설치 위치 1부.  끝.

붙임) ’17년 사업소별 음수대 설치 위치 : 30개소 30대

연번	사업소	공 원 명(개소)	위 치	음수대 (개수)	디자인 선정	관리부서
계		30개소		30대
1	중부	쌍림어린이공원	광희동1가 242	1	퓨어:無	중구 공원녹지과
2		강변소공원	이촌동 408	1	퓨어:無	용산구 공원녹지과
3		동방어린이공원	장위동 219-223	1	퓨어:無	성북구 공원녹지과
4		성북근린공원	성북동 168-274	1	퓨어:無	〃
5	서부	홍연어린이공원	홍은2동 408-4	1	퓨어:無	서대문구 푸른도시과
6		두리어린이공원	망원동 436-1	1	퓨어:無	마포구 공원녹지과
7		녹번마을마당	녹번동 104-7	1	Running Water	은평구 공원녹지과
8	동부	상원어린이공원	성수1가2동 715-1	1	퓨어:無	성동구 공원녹지과
9		무지개어린이공원	성수2가1동 844	1	퓨어:無	〃
10		정릉천(용두교)	-	1	Running Water	동대문구 치수과
11		정릉천(제기1교)	-	1	Running Water	〃
12		성북천(동진교)	-	1	Running Water	〃
13		꽃동산어린이공원	망우3동 441-1	1	Drop Plop	중랑구 공원녹지과
14	북부	솔밭근린공원	삼양로 561	1	Drop Plop	강북구 푸른도시과
15	강서	목동근린공원	목2동 517	1	Drop Plop	양천구 공원녹지과
16		능골어린이공원	고척2동 220-3	1	퓨어:無	구로구 공원녹지과
17		황금내근린공원	가양3동 1485-5	1	Running Water	강서구 공원녹지과
18		궁산근린공원	가양1동 산4-7	1	Running Water	〃
19		봉제산근린공원 (자연체험학습원)	화곡동 45-14	1	Running Water	〃
20	남부	중앙어린이공원	중앙동 890-1	1	Running Water	관악구 공원녹지과
21		새들어린이공원	신림동 1441-2	1	Running Water	〃

연번	사업소	공 원 명(개소)	위 치	음수대 (개수)	디자인 선정	관리부서
22	남부	구룡공원	독산로 107길 13	1	Drop Plop	금천구 공원녹지과
23		능골마을마당	독산동 산193-3	1	Drop Plop	〃
24		조마공원	-	1	Drop Plop	〃
25		햇님어린이공원	상도1동 424	1	퓨어:無	동작구 공원녹지과
26		사육신역사공원	노량진동 152-3	1	Drop Plop	〃
27		문래근린공원	문래동3가 66	1	Running Water	영등포구 푸른도시과
28	강남	너른골어린이공원	방배동 144-18	1	퓨어:無	서초구 공원녹지과
29		청계숲어린이공원	신원동 251	1	Drop Plop	〃
30		언구비어린이공원	반포동 720	1	Running Water	〃