투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	하도급 변경계약 내용 통보(서남권야구장건립공사)

1. 서야책감 2014-80(2014.03.24.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 「서남권야구장건립공사」의 하도급 변경계약 사항을 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

ㅇ 하도급 변경계약 내용

하도급 공사명	하도급 업체명	하도급 기간		하도급 금액(원)		하도급 율(%)	변경사유
		변경 전	변경 후	변경 전	변경 후
토목 공사	야림 건설(주)	‘09.4.13 ∼‘14.2.28	’09.4.13 ∼’15.2.28	3,135,926,208	4,610,555,400	88.17	본공사의 계약기간 연장 및 설계 변경에 따른 계약금액 변경

첨 부 : 감리단 검토 보고 공문 1부. 끝.

	건축부장
★주무관	조영두		건축총괄과장	강성욱		건축부장	03/31 이병석
협조자
시행	건축부-3931	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15(서소문동 37) 시청별관 2동 2층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02 3708-2616	/전송	02-3708-2659	/		/	대시민공개