문서번호	시설과-874
결재일자	2017.3.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
최종성	장창원	03/22 진병규
협 조
	공원운영과장		서동선
	주무관		강희진
	주무관		김영균
	주무관		김재희
	주무관		최지효
	주무관		김정중

2017년 상반기소공원 시설공사 하자조사 추진계획

2017. 3

동부공원녹지사업소

(시설과)

2017년 상반기

소공원 시설공사 하자조사 추진계획

우리사업소 관할 소공원 중 시설과에서 공사 준공후 시설 인계한 시설공사를 대상으로 하자조사를 추진하여 식재 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		하자조사 개요

❍ 조사대상 : 공사 18개, 관급자재 2개

(시설과에서 공사 준공후 소공원에 시설인계한 공사)

- 보라매공원 : 공사 16개, 관급자재 2개

- 천호공원 : 공사 1개

- 응봉공원 : 공사 1개

※ 2017.3.22. 까지 완료한 시설공사

❍ 조사기간 : 2017. 3. 24. ~ 2017. 5. 12.

❍ 조 사 자 : 팀장, 담당자, 소공원 담당

❍ 조사내용 : 식재 및 시설물 하자 조사 등

❍ 관리방법 : 공사준공 후 시설물 인계하여 소공원에서 유지관리

❍ 공사현황

연번	공사명	공사기간	공사내용	시공사	하자책임 담보기간	비고	담당
1	보라매공원 북동산 절개지 옹벽설치공사	‘12.6.8 ‘12.7.27	개비온옹벽 등 4종	******	‘12.7.28 ~’17.7.27	5년	최지효
2	보라매공원 남문화장실 등 2개소 리모델링공사 (방수공사)	‘13.12.29 ~‘14.6.20	남문,놀이터 화장실 리모델링 등	******	‘14.6.25 ~‘17.6.24	3년	김영균
3	2014 보라매공원 시설물 정비공사 관급자재 <인조잔디>	‘14.5.22 ~‘14.7.17	인조잔디(2,536㎡)	******	‘14.7.19 ~‘17.7.18	3년	최지효
4	2015년 응봉공원 시설물 정비공사	’15.4.16 ~’15.6.18	게이트볼장 정비 등	*******	’15.6.19 ~’17.6.18	2년	장창원
5	보라매공원 변전실 방수공사	’15.3.25 ~’15.4.8	변전실 방수	*******	’15.4.9 ~’18.4.8	3년	김영균
6	보라매공원 복층림 조성 및 벽면녹화 공사	’15.5.11 ~’15.6.24	수목식재 등	*******	’15.6.26 ~’17.6.25	2년	김재희
7	보라매공원 시설물 정비공사 (보라매 둘레길 조성)	’15.7.13 ~’15.9.15	둘레길 조성	*******	’15.9.22 ~’17.9.21	2년	김재희
8	보라매공원 와우산 음수대 배관 설치공사	’15.9.30 ~’15.10.14	음수대 급수, 퇴수관 설치	*****	’15.10.17 ~’17.10.16	2년	최지효

연번	공사명	공사기간	공사내용	시공사	하자책임 담보기간	비고	담당
9	보라매공원 어린이놀이터 음수대 및 누수배관 교체 공사	’15.10.28 ~’15.11.2	음수대 및 누수배관 교체, 소형고압블럭 및 대리석 철거 및 설치	*****	’15.11.5 ~’17.11.4	2년	최지효
10	보라매병원 옆 경사로 (문창중방향) 개선공사	’15.10.28 ~’15.11.11	보도블럭 철거 및 원상복구, 핸드레일 교체 설치 25m	*******	’15.11.17 ~’17.11.16	2년	최지효
11	보라매공원 내 남부장애인복지관 담장개선공사	’15.11.9 ~’15.12.10	담장 부분 철거 및 신설 20m, 남문진입로 포장 부분 보수 등	*******	’15.12.15 ~’17.12.14	2년	최지효
12	보라매공원 내 쓰레기보관대 구매	’15.10.26 ~’15.12.7	쓰레기보관대 1개소	*****	’15.12.12 ~’17.12.11	2년	최지효
13	보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(별동신축)	’16.3.7 ~’16.11.10	근로자 대기실 및 창고 신축	*******	’16.11.10 ~’21.11.9	5년	김영균
14	보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(전기, 전기소방)	’16.3.18 ~’16.11.4	등기구설치 82개, 분전반설치 4면 등	**********	’16.11.10 ~’17.11.9	1년	강희진
15	보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(통신)	’16.3.18 ~’16.11.4	cctv 설치 등	*********	’16.11.25 ~’17.11.24	1년	강희진
16	천호공원 무장애 친화공원 조성공사	’16.8.25 ~’16.11.2	식재공사,경사데크 1개소, 투수블럭 105㎡등	*****	’16.11.15 ~’18.11.14	2년	장창원
17	동부공원녹지사업소 청사 난방배관 정비공사	’16.9.9 ~’16.9.28	난방배관 교체	*****	’16.9.28 ~’18.9.27	2년	김영균
18	보라매공원 신축건물 주변 조경 공사	’16.11.7 ~’16.11.13	식재공사	*******	’16.11.16 ~’18.11.18	2년	최종성
19	보라매공원 현장근로자 대기실 환경개선공사	’16.12.26 ~’16.12.28	옥외계단 출입문 설치 등	*****	’16.12.30 ~’17.12.29	1년	김영균

Ⅱ		조사 세부내용

❍ 공사별 담당, 소공원 담당, 시공자 입회하에 하자 유무 조사

❍ 시공자 미입회시 자체 하자조사 실시

❍ 하자조사 결과 안전과 직결된 사항 등 중대한 사항에 대하여는   안전통제 및 시공사에 우선 조치 통보

Ⅲ		향 후 계 획

❍ 2017. 3. 22 : 시공사 입회 공문 발송

❍ 2017. 3. 24 ~ 4.14 : 하자조사

❍ 2017. 4. 18 : 하자 이행 통보

❍ 2017. 5. 12 : 하자 이행 완료 및 결과 보고

Ⅵ		행 정 사 항

❍ 하자이행 완료후 각 공사별 담당은 하자검사관리부 작성하여 총괄 담당에 통보

❍ 또한 하자담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 최종검사 시행

붙임 : 1. 하자검사 조서.

2. 하자검사관리부. 끝.