투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	건설폐기물 처리용역 설계변경(1회) 및 변경계약 의뢰(청계천 생태환경 개선공사 2단계)

우리본부에서 시행중인 『청계천 생태환경 개선공사(2단계) 건설폐기물 처리용역』의 설계 변경(1회) 및 변경 계약을 다음과 같이 의뢰합니다.

1. 용 역 명 : 청계천 생태환경 개선공사(2단계) 건설폐기물 처리용역

2. 용역개요 : 폐콘리트 3,586톤, 폐아스팔트 67톤

3. 계 약 자 : ㈜삼양이앤디 대표자 최훈성

4. 계약금액 : 금93,483,000원

5. 계약기간 : 2016. 9. 27. ~ 2017. 12. 31.

6. 사    유 : 신규 발생 물량 반영 및 확보된 예산 범위내에서 설계변경,

정비 시기가 유동적인 산책로 정비구간 폐기물 수량 제외 반영

7. 변경계약(설계변경) 의뢰내용

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감
계약금액	93,483,000원	43,790,000원	감)49,693,000원
계약기간	변경없음

8. 예산과목 : 물순환안전국 하천관리과, 치수 및 하천 관리, 하천복원

및 정비, 청계천 개선 보완사업, 시설비

붙 임 : 1. 설계변경(1회) 검토보고서 1부.

2. 설계변경내역서(1회) 1부.

3. 관련보고서(건설폐토석) 1부.

4. 계약자 합의각서 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),건설총괄부장
주무관	박중모		치수시설과장	조성만		방재시설부장	03/22 남궁용
협조자
시행	방재시설부-4748	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	3708-8772	/전송	3708-8756	/	p05480548@seoul.go.kr	/	대시민공개