문서번호	시설과-888
결재일자	2017.3.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장		동부공원녹지사업소장
김재희	송복식	진병규		03/22 이용태
협 조

국외 서울공원(파리, 베를린) 정비사업 시행 계획

2017.3

동부공원녹지사업소

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

국외 서울공원(파리, 베를린) 정비사업 시행 계획

해외 자매도시 교류사업 등으로 조성한 국외 서울공원(파리, 베를린)의 일부 시설이 노후 훼손되어 아래와 같이 정비공사를 시행하여 대외 이미지 제고에 기여하고자 함

Ⅰ		사업근거

❍ 해외 서울공원 관리실태 점검 국외 출장 결과 보고

[동부공원녹지사업소 시설과-3384호(‘16.6.28)]

❍ 2017년도 국외공원 정비 및 점검 추진계획[공원조성과-2231호(‘17.2.22)]

Ⅱ		추진개요

❍ 사 업 명 : 국외 서울공원(파리, 베를린) 정비공사

❍ 위    치

- 파  리 : 파리시 16구 블로뉴숲 아끌리마따시옹공원 내

- 베를린 :  베를린 동쪽 마르짠지역 세계의 공원 내

❍ 규    모 : 파리 4,675㎡, 베를린 3,000㎡

❍ 주요시설 :

- 파  리 : 육각정자 1동, 피세문, 불로문, 중문, 월대, 세심지,월하교,꽃담, 토담, 중도, 연못, 사고석담장, 화계, 굴뚝, 수목 등

- 베를린 : 계정(사랑채 겸 정자) 1동, 솟을대문 1개소, 협문 4개소, 전통와편담장, 돌담, 계류, 마당, 수목 등

❍ 사업기간 : ‘17. 1월 ~ 12월

❍ 소요예산 : 351백만원(시설비 344, 여비 7)

❍ 예산과목 : 공원조성과, 생활권 공원확충, 노후공원 재조성, 국외 서울공원 관리실태 점검 및 정비, 시설비(401-01)

Ⅲ		시행계획

[설   계]

❍ 계약방법 : 수의계약

❍ 사    유 : 금액이 소액이고 설계 전문업체와 계약을 체결하여 사업 시행에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제25조 제1항 제5호

❍ 계 약 자 : ㈜천마이앤씨  대표 제상호

☞ 주 소 : 서울시 노원구 동일로 184길 35

❍ 소요예산 : 21백만원

❍ 용역기간 : 착수일로부터 150일

[공  사]

❍ 계약방법 : 일반공개경쟁

❍ 입찰참가자격 : 해외건설촉진법에 의한 조경공사업 등록 업체

❍ 소요예산 : 323백만원

Ⅳ		향후 추진일정

❍ 2017 . 4.  ~  8. : 실시설계용역 시행

❍ 2017 . 9.         : 공사계약 및 업체선정

❍ 2017 . 9. ~ 10. : 자재 준비 및 운송

❍ 2017. 10. ~12. : 공사시행 및 준공

붙  임 : 1. 사업 추진 계획서(市) 1부.

2. 국외 서울공원 종합계획도 1부.  끝.