“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	통일문화관 건립 타당성 조사 용역 변경계약 의뢰(준공기한 연기)

1. 문화시설과-2552(2017.3.22.)호와 관련입니다.

2.「통일문화관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역」과 관련하여 용역계약 기간을 다음과 같이 연장코자 하오니, 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 통일문화관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역

나. 계약기간 : 2016. 9. 1. ~ 2017. 3. 29 (7개월)

다. 계약금액 : 금58,200,000원(금오천팔백이십만원)

라. 용역업체 : 성공회대학교 산학협력단

마. 계약 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
계 약 기 간	‘16. 9. 1~’17. 3. 29	‘16. 9. 1~’17. 5. 19	51일 연장
계 약 금 액	58,200천원	58,200천원	변동없음

바. 변경사유 : 서울공공투자관리센터 용역 검증 결과 검토 및 반영 등을 통한 용역수행의 완성도 제고를 위해 준공기한 연장

붙임 : 1. 용역기간 연장계획 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	문화시설과장
주무관	최범준		문화시설1팀장	김광식		문화시설과장	03/23 오희선
협조자	계약1팀장	조현
시행	문화시설과-2588	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	2133-4221	/전송		/	canadajoon@seoul.go.kr	/	부분공개(5)