＂명품 아리수, 명품 강남수도!＂
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 연기(교통소통대책 수립용역)

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 『이수고가차도~사평지하차도간 배수관정비공사 교통소통대책 수립용역』건에 대하여 아래와 같은 사유로 준공기한을 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역현황

- 용 역 명 : 이수고가차도~사평지하차도간 배수관정비공사 교통소통대책 수립용역

- 용역기간 : 2017.  2. 17.~ 2017. 3. 28.

- 용 역 비 :9,405,000원

나. 준공기한

- 당 초 : 2017. 2. 17. ~ 2017. 3. 28.

- 변 경 : 2017. 2. 17. ~ 2017. 4. 28.

다. 연기사유 : 도로점용 공사장 교통소통대책 제출에 따른 자문회의 심의 예정

라. 지체상금 : 미부과

따로붙임 : 준공기한 연기 방침서 및  합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	강희창		시설관리과장	03/23 박희철
협조자
시행	시설관리과-6691	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)459-4	/
전화	02-3146-4905	/전송	02-3146-4939	/	jin2ju@seoul.go.kr	/	대시민공개