“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기 의뢰(천호지하차도 철거·평면화사업 타당성조사 용역)

1. 도로계획과-4384(2017.3.23.)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행 중인「천호지하차도 철거·평면화사업 타당성조사 용역」에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 천호지하차도 철거·평면화사업 타당성조사 용역

나. 계 약 자 : ㈜태조엔지니어링

다. 준공기한 연기내역

- 당 초 : 2017. 3. 31

- 변 경 : 2017. 5. 16

라. 귀책소재 : 서울특별시

마. 연기사유 : 타당성조사 용역 검토내용에 대한 관련기관 협의,
전문가 자문 등 추진을 위한 기간 소요

붙 임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기 방침서 1부.

3. 계약변경합의서 1부. 끝.

	도로계획과장
전문관	윤갑진		광역도로계획팀장	박영서		도로계획과장	03/23 하종현
협조자
시행	도로계획과-4410	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 10층 도로계획과	/
전화	02-2133-8087	/전송	02-2133-0763	/	yunis777@seoul.go.kr	/	대시민공개