문서번호	토목과-3515
결재일자	2017.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관		토목팀장		토목과장	안전건설교통국장
우한상		유은중		박주완	03/24 김재겸
협조
	교통행정과장		조덕현
	주무관		이승면

★ ◉

금호로 (금호유수지앞) 차로 확장 검토 보고

성   동   구

(토 목 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □( ) 무 ☑
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 ☑
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

금호로(금호유수지앞) 차로 확장 검토 보고

금호유수지내 독서당 및 배드민턴장 신축, 금호20구역 주택재개발 사업이 진행 중에 있어 금호로의 교통정체가 우려되므로 기존 보도 폭 축소 및 차로 폭 조정을 통해 금호사거리 방향 1개차로 확장을 검토코자함.

Ⅰ		현 황

❍ 금호로 금호유수지 구간은 평균26m의 왕복 6차로로, 금호동 지역의 재개발사업 등 차량증가로 교통정체가 가중되고 있음

❍ 금호20구역 재개발, 독서당, 배드민턴장 준공 등으로 차량통행량이 대폭 증가가 예상되고, 진입하기 위한 우회전차량 과 직진차량 간섭으로 교통정체 가중 우려됨

- 독서당 공사 중(2017.6.24. 준공예정), 배드민턴장 상반기 중 공사 발주예정

- 금호 20구역 주택 재개발 사업 시행중(2018. 2. 준공예정, 606세대)

❍ 독서당 및 배드민턴장 시공 계획에 의하면 건축물 외벽과 도로경계사이에 4m정도의 공간이 있어 보도로 활용이 가능함

Ⅱ		사업개요

□ 차로확장 방안

❍ 6차로 차로 폭을 축소하고 금호유수지앞 보도를 차도로 변경하여 7차로 확보

❍ 금호유수지내 독서당 및 배드민턴 건축물외 남은 부지를 보도로 조성

□ 사업내용

❍ 위    치: 금호동4가 56(금호유수지)

❍ 규    모: 도로확장 B=3.0m, L=150m(보도축소 및 차로 폭 조정)

- 이설 지장물: 가로등 5주, 가로수 10주, 도로안내표지판 2개소, 전주 2개소,

신호기용 철주4개소, 단속카메라 1대, 버스정류장1개소, 하수관로

❍ 총사업비: 300백만 원

Ⅲ		문 제 점

❍ 차로 확장 후 잔여 보도 폭이 유동적이고(평균 90cm 미만)유수지 슬래브 (콘크리트)로 인하여 표지판, 가로등, 신호등, 가로수, 승차대 등 지상구조물 설치 공간 확보가 어려움.

❍ 금호유수지와 금호로의 단차로 인해 보도 폭 축소 시 차량진출입 경사가   심하여 차량진출입시 안전문제 발생 우려(도로와 유수지 높이차 H=0.25m)

❍ 독서당은 금년 6월 준공, 배드민턴장은 하반기 준공 예정이며 기존 보도 정비       공사가 예정되어 있어, 추후 도로 확장사업을 시행할 경우 예산 낭비 초래

Ⅳ		추진계획

□ 추진내용

❍ 1개차로 증설 가능 여부 및 사업 시행 시 교통정체개선 효과 등 분석: 교통행정과

❍ 사업효과가 있다고 판단될 경우 우리 구 관련 부서와의 회의 및 서울시 관련         부서와의 협의를 통해 사업시행여부 판단

- 차로 폭 축소 및 차로수 확대, 예산 확보: 서울시 도로관리과, 성동도로사업소

- 보도상 지상구조물 이설 및 유수지 슬라브 개수: 공원녹지과, 교통행정과, 치수과

- 독서당 및 배드민턴장 부지 내 보도 조성: 교육지원과, 문화체육과

※ 당초 보도정비 예산을 도로정비비로 사용 여부 등 협의

□ 추진일정

❍ 2017. 3.: 차로증설 및 교통개선효과 분석 검토 (교통행정과)

❍ 2017. 4.: 서울시, 성동구 관련부서 협의

붙임: 위치도 및 단면도 1부.