출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	방재시설과장	방재시설부장
	임병길	홍석환	03/31 박종웅

	명에 의하여 송정, 사근빗물펌프장 증설공사 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 3. 31
보 고 자 : 직 시설 6급 성명 : 임병길

보 고 내 용
일 시	2014. 3. 31(월). 13:20 ~ 17:20
건 명	공사현장 출장결과 보고서(박종웅,임병길)
내용	□ 출장내용 ○ 출장장소 : 송정,사근 빗물펌프장 증설공사 ○ 출 장 자 : 2명 (방재안전시설부장, 공사관리관) ○ 출장목적 : 공사장 안전관리상태 현장점검 〔송정펌프장〕 - 가시설 공사시 강관버팀보 조속 설치 및 과굴착 금지하여 변위 최소화 도모 - 가시설 단계별 설계축력과 변형율계 계측치를 비교 분석하고 주기적으로 관리하여 안전시공 철저 - 기존 유수지 경계부에 임시 차수벽을 조속 설치하여 2014 수방업무에 차질이 초래되지 않도록 공정관리 철저(4.15이전 완료) - 우기철 집중호우시 증설펌프장 내부로 우수유입이 우려되므로 작업자 및 장비 대피계획서 등을 사전 작성하고 모의훈련 실시 - 임시차수벽 하단부 및 기존 유수지 벽체 접속부에 누수방지를 위한 지수재 견실시공, 톤마대 쌓기 등 사전조치 〔사근펌프장〕 - 벽체 콘크리트 타설전 거푸집 동바리 등을 세밀히 검측하고 타설 순서를 이행하여 안전사고 예방 - 기존 펌프장건물 외부 작업시 작업발판, 안전대 걸이용 로프, 안전벨트 착용 등 안전수칙을 이행하여 근로자 추락사고 사전예방 조치 - 빗물펌프장 공사는 우기철 이전에 펌프 기능을 회복해야 하는 한시성 사업이나 안전 및 품질관리 확보토록 제반조치 철저
비 고