서울속으로 한발더, 시민곁으로 한뼘더
	서울특별시의회
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약체결 통보(공사)

1. 의정담당관-3466호(2017.03.27.)와 관련된 사항입니다.

2. 위 호와 관련하여 「시의회 의원회관 2층 제1대회의실 등 바닥 교체공사」가 다음과 같이 변경계약 체결 되었음을 알려 드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 변경계약 건명 : 시의회 의원회관 2층 제1대회의실 등 바닥 교체공사(변경)

나. 변경계약 사유

- 현장여건을 반영한 설계변경(재료비 증액, 노무비 감액, 제경비 감액)

다. 변경계약 체결내역

변경계약일자	계약업체 (대표자)	계약금액		준공일자
		변경전	변경후
2017. 03. 27.	㈜혜원건영 (최길상)	금55,194,000원	금55,048,000원 (감 146,000원)	2017. 03. 28.

붙 임 : 변경계약서 일체 1부.  끝.

주무관	탁성은		의정지원팀장	박지향		의정담당관	03/27 정광현
협조자	시설관리팀장	이문주
시행	의정담당관-3487	(		)	접수		(		)
우			/	http://smc.seoul.kr
전화		/전송	3702-1268	/		/	부분공개(6 7)