투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(920공구 건설공사, 총괄7회 및 9차1회)

1. 우리 본부에서 시행중인 『서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사』에 대하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사

나. 계 약 자 : 롯데건설㈜ 외 1개사

다. 변경내용

(단위 : 천원)

구분	계약금액			기간			비고
	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
총괄 (7회)	156,190,260	157,561,856	1,371,596	‘09.12.31.∼ ‘18.12.31.	‘09.12.31. ∼ ‘18.12.31.	변경없음	증액분: 세입세출외 현금
9차 (1회)	24,163,000	25,534,596	1,371,596	‘17.01.02.∼ ‘17.12.31.	‘17.01.02. ∼ ‘17.12.31.	변경없음	증액분: 세입세출외 현금

라. 변경사유

- 한국수자원공사(팔당권관리단)와 협약 체결한 “수도권 광역상수도 2단계 방이동구간 관로이설공사”를 920공구 건설공사에 포함 시행에 따른 계약금액 조정

마. 예산과목

- 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 시설비및부대비, 시설비

- 세입세출외 현금(1,371,596,000원) : 우리은행 2************-677

붙임 : 1. 검토보고서 1부.

2. 감리단 공문(총괄7회, 9차1회) 각1부.

3. 감리 검토보고서(총괄7회, 9차1회) 각1부.

4. 변경내역서(총괄7회, 9차1회) 각1부.

5. 시공사 공문(총괄7회, 9차1회) 각1부.

6. 변경현황도 1부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	서재원		주무관	문병종		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	03/28 김진팔
협조자	기획예산과장	代박해진		경리과장	최정수
시행	도시철도토목부-3978	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어플레이스 9층	/
전화	02-772-7125	/전송	02-772-7306	/	seojw83@seoul.go.kr	/	부분공개(7)