문서번호	시설과-1526
결재일자	2014.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
이석중	오재영	한성현	03/31 신시섭
협 조

매립지 하늘공원 북측사면

정밀안전진단용역 결과보고

2014. 3

서울특별시 서부공원녹지사업소

[ 시 설 과 ]

매립지 하늘공원 북측사면

정밀안전진단용역 결과보고

■ 용역개요

❍ 용 역 명 : 매립지 하늘공원 북측사면 정밀안전진단용역

❍ 위    치 : 하늘공원 북측사면

❍ 용역기간 : ’13. 12. 19. ~ ’14. 3. 18.

❍ 용역규모 : A=440,000㎡

❍ 용 역 비 : 42,884천원

❍ 용 역 사 : 주식회사 예담엔지니어링 대표 김종원

■ 추진경위

❍ ’13. 10. 7. : 2014년 예방사방사업 대상지 조사 결과보고서

2014년 예방사방사업 정비계획 통보

❍ ’13. 11. 21. : 기술용역 타당성심사 요청

❍ ’13. 11. 27. : 용역 발주

❍ ’13. 12. 16. : 용역 계약

❍ ’14. 03. 18. : 용역 준공

■ 용역결과

❍ 손상현황 : 토사침식, 뜬돌발생, 도수로 및 측구 손상, 석축균열 등

❍ 상태 평가

- 정밀점검 및 정밀안전진단 세부지침 상태평가 결과 : A등급

- 소방방재청 재해위험도 평가기준 상태평가 결과 : B등급

❍ 안정성 평가

- 대단면 : A등급

- 토사표면파괴 : A 및 D등급

❍ 종합평가(안전등급 B등급 )

- 상태평가와 안정성평가 등급 결과를 반영

- 설계안전율을 만족하는 계획된 성토사면임을 고려 B등급으로 판정

- 토사표면파괴 D등급으로 평가된 구간에 대하여 추가적인 사면유실을 방지하기 위한 보수·보강공법이 필요함

■ 조치계획

❍ 용역 준공검사 후 준공처리

❍ 취약구간 사면 보수·보강공사 예산배정 요청(산지방재과)

❍ 사면 수시점검 및 일상유지보수.  끝.