문서번호	교량안전과-1708
결재일자	2017.2.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
송준섭		유제천	02/01 신응수
협 조
	주무관			백운경
	주무관			김윤희
	주무관			김인철

2017년 건설폐기물처리용역 발주계획 보고

(한강교량 일상유지보수공사 외 4건)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.02.

교량안전과

(교량관리팀)

2017년 건설폐기물처리 용역 발주계획 보고

(한강교량 일상유지보수공사 외 4건)

2017년 한강교량 일상유지보수공사 외 4건에서 발생되는 건설폐기물을 신속하고 효율적으로 처리코자 건설폐기물처리 용역 발주계획을 보고 드림

Ⅰ		근 거

건설폐기물의 처리 및 재활용 관련 업무처리 지침(환경부예규 제552호, ‘15.8.10.)

‘17년 교량안전과 건설폐기물처리 용역 발주계획 보고(교량안전과-1631, ‘17.1.31.)

Ⅱ		사업현황

2017년 폐기물 발생사업 현황(교량관리팀 7개 사업 중 5개 사업)

연 번	공 사 명	사업내용	발주방법
1	한강교량 일상유지보수공사(1,2공구)	한강교량 20개소 연간 일상 유지보수	통합발주
2	한강대교 보수공사	교면포장 및 방수 4a, 측구보수 840m, 이음새보수 4,000m 등
3	PSC 안전강화(서강대교) 보수공사	교면포장 및 방수 145a
4	성수대교 보수공사	교면포장 및 방수 26a, 강재도장 1,520㎡ 등
5	탄천1교 보수공사	교면포장 및 방수 114a, 바닥판 단면보수 4,342㎡ 등
6	영동6교 내진성능보강공사	교량받침교체 60ea 등	추후정산
7	한강교량 노후목재데크교체 보수공사	노후목재데크 교체 1,520㎡(한강 1,100㎡, 한남 420㎡)

※ 폐기물발생 100톤 미만 사업은 도급자 위탁처리 후 정산(2건)

Ⅲ		폐기물처리용역 발주계획

개   요

► 용 역 명 : 2017년 한강교량 일상유지보수공사 외 4건 건설폐기물 처리 용역

► 용역기간 : 착수일 ~ 2017.12.31

► 용 역 비 : 215,600천원

► 용역물량

- 건설폐기물 수집․운반  : 9,180톤(폐콘크리트 680톤, 폐아스콘 8,500톤)

- 건설폐기물 중간처리  : 9,180톤(폐콘크리트 680톤, 폐아스콘 6,632톤, 혼합폐기물 1,868톤)

※ 서울특별시 순환골재 등의 활용촉진에 관한 규정(훈령 제963호)에 의거 재생    아스팔트는 가공하여 순환골재를 사용함에 따라 폐아스콘중 평삭재는 운반비만    지급하고 처리비용은 무대처리

입찰참가자격

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 요건을 갖춘 자로서 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제21조 및 폐기물관리법 제25조 규정에 의한 건설폐기물 수집·운반업과 폐기물중간처리업(또는 폐기물종합처리업, 단 재생아스콘 생산시설을 보유한 자이어야 함) 허가를 모두 득한 업체로 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지  주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

나. 단, 자격보완을 위하여 건설폐기물 수집․운반업 허가만 득한 업체는 서울특별시 또는 인천광역시 또는 경기도 지역의 재생아스콘 생산시설을 보유한 중간처리업체와 공동도급(분담이행방식)이 가능하며,  이 경우 대표자는 서울특별시에 소재한 업체

폐기물처리 예정 물량

공 사 명	폐기물 처리비 (천원)	건설폐기물(톤)				비 고
		총 계	콘크리트	아스콘	혼합폐기물
합 계	215,600	9,180	680	6,632	1,868
한강교량 일상유지보수공사(1,2공구)	89,000	3,930	380	2,840	710
한강대교 보수공사	9,000	400	50	280	70
PSC 안전강화(서강대교) 보수공사	65,700	2,750	-	2,062	688
성수대교 보수공사	10,600	500	-	400	100
탄천1교 보수공사	41,300	1,600	250	1,050	300

사업별 예산과목

► 2017 한강교량 일상유지 보수공사(연간단가)-1,2공구 (89,000천원)

교량관리, 한강교량관리, 한강교량 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

► 한강대교 보수공사 (9,000천원)

교량관리, 한강교량관리, 한강대교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

► PSC 안전강화(서강대교) 보수공사 (65,700천원)

교량관리, 한강교량관리, PSC 안전강화 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

► 성수대교 보수공사 (10,600천원)

교량관리, 한강교량관리, 성수대교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

► 탄천1교 보수공사 (41,300천원)

교량관리, 일반교량관리, 탄천1교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅳ		향 후 계 획

○ ’17.   2 : 계약심사

○ ’17.   2 : 발주 / 계약

○ ’17.   3 : 착수

○ ’17. 12 : 준공

붙 임 : 폐기물처리 용역 설계내역서 1부. 끝.