투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	단가계약물품 변경구매 - 관급자재 레미콘 구매(망원초록길 조성공사)

1. 기전설비2과-1309(2014.3.28.)호와 관련입니다.

2. ‘관급자재 레미콘 구매(망원초록길 조성공사)’건에 대한 해당부서의 변경요청이 있어 다음과 같이 계약을 변경하고자 합니다.

가. 건       명 : 관급자재 레미콘 구매(망원초록길 조성공사)

나. 계약 변경내역                                            (단위 : 원)

물품식별번호	품명/규격	단위	단가(원)	변경요청수량(㎥)			변경계약금액(원)
				당초	변경	증,감	당초	변경	증,감
10063090	레미콘/ 25-18-8	㎥	55,600	151	1,087	증936	8,395,600	60,437,200	증52,041,600
10063094	레미콘/ 25-21-8	㎥	59,670	31	60	증29	1,849,770	3,580,200	증1,730,430
계							10,245,370	64,017,400	증53,772,030
조달수수료		1	식				52,550	345,690	증293,140
합 계							10,297,920	64,363,090	증54,065,170

다. 변경사유 : 현장 여건 등에 따른 물량증가

붙  임 : 관급자재 변경 요청서.  끝.

주무관	박신영		총무과장	03/31 代김지형
협조자
시행	총무과-4537	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	calla121@seoul.go.kr	/	대시민공개