문서번호	조경과-1703
결재일자	2014.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
조진성	윤희숙	이성주	정상택		03/31 안영노
협 조
	동물원장			노정래
	동물복지과장			이달주

「백두산호랑이숲 조성공사」

자문결과에 대한 조치계획(안) 보고

2014. 3.

서울대공원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

「백두산호랑이숲 조성공사」

자문결과에 대한 조치계획(안) 보고

「백두산호랑이숲 조성공사」 추진과 관련 전문가 자문 및 관련 직원 내부검토회의를 개최하고 자문의견에 대한 조치계획(안)을 보고 드림

Ⅰ		추진개요

추진근거

◦ 백두산호랑이숲 조성공사 자문회의 및 내부검토회의 결과보고

(조경과-290, 291, ‘14.1.17)

공사개요

◦ 공 사 명 : 백두산호랑이숲 조성공사

◦ 공사기간 : 2012. 12. 27 ~ 2014. 4. 30

◦ 도 급 액 : 2,377백만원

◦ 도 급 자 : 미래종합조경(주) 주정수 / ㈜신영그린시스 심재홍

Ⅱ		자문회의 등 개최

전문가 자문 회의

◦ 일    시 : ‘13. 12. 30 ~ ‘14. 1. 10 (총 6회)

◦ 참 석 자 : 자문위원 10명, 서울대공원 관계직원 다수

◦ 주요자문내용

- 동물탈출 및 안전사고 방지를 위한 시설물 관련사항

- 관람로 및 관람장소, 방사장내 각종 조경시설에 대한 사항

- 동물 생태습성, 전시, 사육 등에 관한 사항

- 기타 공사전반에 대한 사항

◦ 유형별 자문의견 : 6개분야 총 69건

계	안전휀스	관람대 B	방사장	수목식재	관람장소	기타
69	10	11	7	15	10	16

내부검토 회의개최

◦ 일    시 : ‘13. 12. 30(월) 10:30~14:30

◦ 참 석 자 : 총 22명 (이형숙교수, 관리부장 등 대공원 직원)

◦ 주요 검토내용

- 안전휀스 하단부 이격거리

- 인공암 높이, 경사 및 마감부분, 상부전책 필요성

- 수목, 바위 위치 및 높이, 이격거리

- 전책계획 검토 등

합동 실무회의 개최

◦ 일    시 : ‘14. 1. 22(수), 23(목)

◦ 참 석 자 : 대공원 4명(윤희숙, 김기배, 한상길, 조진성), 시공사, 용역사

◦ 주요내용 : 전문가 자문 등 검토의견에 대한 원인분석 및 조치방안 수립을 위한 실무회의

Ⅲ		검토의견 및 결과

시설개선 협의회 안건상정

◦ 일    시 : ‘14. 2. 12(수)

◦ 참 석 자 : 관리부장 등 14명

◦ 주요내용

- 조치방안에 대하여 사안별 검토

- 관련부서 의견수렴 및 대안제시

- 추진방향 설정 등

주요 검토사항

◦ 동물탈출방지 안전휀스 보강, 관람대상부 보강판 설치

◦ 관람시야 확보를 위해 계류 상단 시설물 조정

◦ 관람객 안전을 위한 2층 목재휀스 연장 및 난간 등 보강

◦ 탈출방지를 위한 전책 추가 설치 및 위치 변경

◦ 방사장 마사토 포설 및 수목식재, 은신처 조성  등

검토의견 요약

◦ 당초 계획에 반영되지 않은 사항으로 동물탈출 또는 관람객 안전사고가 우려되는 사항은 우선 반영

◦ 시설물 설치보다는 관람환경 및 주변경관을 고려한 방안으로 대체

- 목재가림판 추가설치 → 수목보완, 관람대상부 보강판 → 전책으로 대체

◦ 기존 공종에 대한 변경(철거, 위치이동 등)은 추가 공사비 미반영

◦ 시범시행이 필요하거나 추후조치가 가능한 사항은 일부 반영

◦ 시민안전과 동물탈출방지를 위한 시설 보완이지만 타당성, 대안 등 제반사항을 검토하여 설계변경 최소화

Ⅳ		조치계획

동물탈출방지와 시민안전을 위한 보완사항임을 감안 본 사업에 반영하되 시급성을 감안 우선 시공토록 조치하고 설계변경 처리

소요예산 : 176백만원(전기분야 포함) - 예상공사비 <붙임 1>

◦ 공원 안전시설 보수 및 정비(공원경계 외곽휀스 동물탈출 방지 및 산림보호 노후휀스 정비) 예산 활용

붙임 : 검토의견 및 예상공사비 1부.  끝.