문서번호	안전관리과-5228
결재일자	2017.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관		도시안전팀장		안전관리과장		안전건설교통국장
김정우		김용중		장완수		03/31 김재겸
협조	전산정보과장		이미란
	질병예방과장		고향숙
	교통행정과장		조덕현		용답동장		이민채
	토목과장		代유은중		공원녹지과장		신재원

★ ◉

5대분야 사망자수 감축을 위한

『안전한 지역사회 만들기 모델사업』 실시

성   동   구

(안전관리과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 ☑ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통·갈등 분야 고려사항		●	구민			:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	전문가			:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	이해당사자			:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	갈등발생요인			:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 ☑ ( ) 무 □
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 ☑ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 ☑
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	서울시	:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	기업	:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	민간단체	:	유 ☑ ( ) 무 □
언론홍보 계획		기획보도 ☑ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 □
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

‘안전사고 사망자수 감축’을 위한

『안전한 지역사회 만들기 모델사업』실시

지역중심으로 안전사고 사망자수 감축을 위한 안전한 지역사회 만들기 모델사업을 5대분야(교통, 범죄, 화재, 감염병, 자살)에 대하여 실시하고자 함

Ⅰ		추진근거

▢ 근거

○ 국민안전처 “안전한 지역사회 만들기 모델사업” 공모 선정(2016.3.19.)

○ 2015년 지역안전지수 발표후 ‘안전사고 사망자수 감축목표 관리제’

추진에 따른 안전지수 개선 사업

○ “안전한 지역사회 만들기 모델사업” 연구용역 결과 보고서(2017.3.20.)

Ⅱ		추진내용

▢ 사업기간: 2017.4월 ~ 6월

▢ 사업예산: 800백만원(국민안전처 특별교부세)

▢ 추진분야: 교통사고, 범죄, 화재, 자살, 감염병 예방

▢ 대상지역: 용답동(중점안전개선Ⅰ지구) 등

Ⅲ		세부추진사업

▢ 교통분야

① 옥수교회앞 급경사 우회전 차로 정비

○ 위치: 옥수동 순복음 옥수교회(매봉길 독서당로 교차로)

○ 사업규모

- 도로확장 B=4m→6m, L=25m

- 속도저감시설 추가 설치(미끄럼 방지, 사고석 포장)

- 교통안전시설 추가 설치(차선유도선, LED갈매기표지, 램프 외측

옹벽구간 높이조절, 충격흡수시설 재설치)

○ 사업비: 172백만 원(설계 용역비 22백만 원, 공사비 150백만 원)

○ 추진부서: 토목과, 교통행정과

② 금호사거리 우회전 차로 확장 정비

○ 위치: 금호사거리 교차로(논골사거리 방향 우회전 차로)

○ 사업규모

- 우회전 차로 신설 B=3m, L=30m,

- 보도이설 B=3m, L=30m, 보강토 옹벽설치 H=2m, L=30m

- 지장물(도로안내표지판, 가로등, 가로수, 철재계단, 맨홀) 이설 1식

- 교통섬 및 차선정비 1식

○ 사업비: 78백만 원(설계는 옥수교회앞 급경사 우회전차로에 포함 시행)

○ 추진부서: 토목과, 교통행정과

③ 응봉사거리 발광횡단보도 및 고보조명 설치

○ 위치: 응봉사거리 위 횡단보도

○ 사업규모

- 응봉사거리 발광횡단보도 미 고보조명 설치

○ 사업비: 30백만 원

○ 추진부서: 토목과, 교통행정과

④ 용답초등학교 주변 도로 안전시설물 설치

○ 위치: 용답초등학교 주변 도로

○ 사업규모

- 어린이보호구역 태양광 LED교통표지판 설치

- 어린이보호구역 미끄럼 방치포장 및 교차로알림이 설치

○ 사업비: 95백만 원

○ 추진부서: 토목과, 교통행정과

▢ 화재분야

① 용답중앙시장 화재 골든타임 자동속보기 설치

○ 위치: 용답동중앙상가시장

○ 사업규모

- 용답동 상가 400개소 내에 자동속보기(중계기) 설치

○ 사업비: 70백만 원

○ 추진부서: 안전관리과, 용답동주민센터

② 용답동 화재취약지역 보이는 소화기 설치

○ 위치: 용답동

○ 사업규모

- 용답동 중점개선지구내 화재취약지역 보이는 소화기 설치

○ 사업비: 10백만 원

○ 추진부서: 안전관리과, 용답동주민센터

▢ 범죄분야

① 용답초등학교 공원일대 범죄예방사업

○ 위치: 용답초등학교 공원 일대

○ 사업규모

- 용답초등학교 공원에서 발생되는 범죄를 방치하기 위한 범죄예방사업

- 보안등 변경, 수목 변경, CCTV 설치

○ 사업비: 100백만 원

○ 추진부서: 안전관리과, 토목과, 공원녹지과, 전산정보과, 도시계획과

② 용답동 CPTED 사업 추진

○ 위치: 용답동 중점개선 지구 내

○ 사업규모

- 용답동 중점개선지구내 CPTED 사업 추진

- 범죄예방캐릭터 설치, 비상벨설치, CCTV 설치 등등

○ 사업비: 200백만 원

○ 추진부서: 안전관리과, 토목과, 전산정보과, 도시계획과

▢ 감염병분야

① 용답초등학교 공원 포충기 설치

○ 위치: 용답초등학교 공원 일대

○ 사업규모

- 용답동 공원 감염병 예방을 위한 포충기 설치

○ 사업비: 25백만 원

○ 추진부서: 안전관리과, 질병예방과

▢ 자살분야

① 독거노인 보호용 룸캠(room cam) 설치

○ 위치: 용답동 중점개선지구 내

○ 사업규모

- 독거노인을 대상으로 보호용 룸캠 설치

○ 사업비: 20백만 원

○ 추진부서: 안전관리과, 용답동주민센터

Ⅳ		행정사항

○ 단위사업별 소관부서별 추진계획 시달

○ ‘안전한 지역사회 만들기 모델사업’ 추진결과 제출(7월이후, 구 →국민안전처)