투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(1회) 시행에 따른 계약 의뢰(서울 암사동 선사로~고덕지구간 도로확장공사 부지내 문화재 시굴조사 용역)

1. 한백연 제2014-14호(2014.2.14.)호 및 선사고덕0420-56(2014.2.17.)호와 관련됩니다.

2. 우리 본부에서 시행중에 있는 “서울 암사동 선사로 ~고덕지구간 도로확장공사 부지내 유적 문화재 시굴조사 용역”에 대하여 따로붙임과 같이 설계변경(1회) 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울 암사동 선사로 ~고덕지구간 도로확장공사 부지내 유적 문화재 시굴조사 용역

나. 용역규모

1) 위 치 : 서울 강동구 암사동, 고덕동 일원

2) 시굴조사 48,010㎡

다. 용 역 비 : 금164,780,000원(금일억육천사백칠십팔만원정)

라. 용역기간 : 2013. 3.18. ~ 2014.12.31.

마. 도 급 자 : (재)한백문화재연구원

바. 설계변경 내역(1회)

(단위 : 원)

구 분		용역비 변경 개요				비고
		당 초	변 경	증·감	사 유
1회 변경	용역비	164,780,000	566,302,000	증)401,522,000	시굴조사에서 일부 정밀발굴 조사 전환에 따른 설계변경

붙임 : 1. 설계변경(1회) 내역서 1부.

2. 설계변경(1회) 보고서 1부.

3. 감리 검토서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이한규		광역도로과장	代조양연		토목부장	전결 04/01 노우성
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	토목부-6224	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개