투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	경기도 포천시 중앙로 29-1 대원산림기술사사무소 대표 지기환님 귀하
(경유)
제목	2017년 산사태 예방사업 관련 설계변경 등 검토요청

1. 서울시 푸른도시국 순찰지적사항(2017. 3. 30)과 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 발주하여 귀사에서 감리용역중인 “2017년 산사태 예방사업(남산 등 5개소) 관련 아래와 같은 문제점이 발생하여 통보하오니 설계변경 등을 검토후 결과를 2017. 4.14일 까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 2017년 산사태 예방사업(남산 등 5개소)

나. 시 공 사 : ㈜희담임업(대표 : 안성만)

다. 변경대상

❍ 위    치 : 한남동 산10-96 (SK주유소 맞은편)

❍ 정비내용 : 계류정비(L=86m), 위험등급 : C등급

❍ 주요공종 : 골막이 2개소, 기슭막이 166㎡, 바닥막이 7개소,

벤치플륨관 64m, 침사지 1개소

라. 문제점

❍ 계류에 설치예정인 기슭막이용 깬돌을 일부 현장에 반입되었으나 깬돌의                         색상이 너무 밝아 기슭막이 설치시 주변 자연경관과 어울리지 않음

❍ 사업대상 부지가 한남대로와 인접하여 남산공원 이용 주민 등               시각적 부조화 발생 우려

마. 설계변경 방안

❍ 남산공원 미관을 해치지 않도록 깬돌설치를 최소화하고 자연석 등으

로 교체방안 검토(설계변경 필요)

❍ 현장에 반입된 깬석은 계류 상류측에 설치하고 광화문광장 및 남산          공원내 발생된 자연석을 최대한 재활용 조치

❍ 유역검토를 통해 “깬돌기슭막이” 설치를 최소화하고 자연친화적인             “원호형 돌수로” 설치 가능한 지역은 (⌴형→⌣형)으로 공법변경 검토

끝.

	중부공원녹지사업소장
주무관	김완수		녹지관리팀장	임광빈		녹지관리과장	04/03 김윤철
협조자
시행	녹지관리과-2736	(		)	접수		(		)
우	04628	서울시 중구 삼일대로 231(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02)3783-5944	/전송	02)3783-5949	/		/	대시민공개