문서번호	방재시설부-5395
결재일자	2017.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
고소영		김인숙	03/31 남궁용
협조
	주무관		이원영

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

포트 보온재변경 및 방수테이프 부착 실정보고 검토보고

2017.3.

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

포트 보온재변경 및 방수테이프 부착 실정보고 검토보고

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」식재포트 내부 보온 단열자재 변경 및 방수테이프 추가 부착 실정보고에 대한 검토 보고임.

【관련근거 : 서울역(건)제17-232호(2017.03.27.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울역 7017 프로젝트 건설공사

○ 공사위치 : 서울시 중구 남대문 5가 ~ 만리동 1가 62

○ 시 공 사 : 홍익건설산업(주), ㈜동원개발

○ 도 급 비 : 25,138,300,000원(조경 : 5,918,270,000원)

○ 공사기간 : 2016.04.18. ~ 2017.05.17.

□ 보고내용

○ 식재포트 내부 보온 단열자재 변경 및 방수테이프 부착

- 변경사유 : 식재포트의 내부에 설치하는 보온용 단열자재를 절곡이 곤란한 경질성 발포 폴리스티렌에서 곡선시공이 가능한 연질계열의 발포 폴리에티렌 단열재로 변경하고 포트 수량의 감소에 따른 물량 정산과 보온재 상부를 신규로 방수테이프를 부착하여 마감하는 사항임

- 수량 변경

공 종	당 초			변 경			비 고
	규 격	단위	수 량	규 격	단위	수 량
포트 보온재 설치	발포 폴리스티렌 THK =10㎜	㎡	2,393	발포 폴리에티렌 은박 단열재 10㎜	㎡	2,149
방수테이프 부착		㎡	-	부틸고무계	㎡	146

- 변경 전․후 현황

변경전 : 발포 폴리스티렌(경질)	변경후 : 발포 폴리에티렌(은박, 연질)
변경전 : 보온단열재 상단	변경후 : 방수테이프 부착

○ 공사비 증감내용

공 종	단위	변경전			변경후			증 감(천원)	비 고
		수량	단가	금액(천원)	수량	단가	금액(천원)
포트보온재 설치	㎡	2,393	2,154	5,154	2,149	8,785	18,879	+) 13,725
방수테이프 부착	㎡		-	-	146	52,703	7,695	+) 7,695
직접공사비				5,154			26,574	+) 21,420
제경비				2,276			8,676	+) 6,400
공급가액				7,430			35,250	+) 27,820
부가 가치세				743			3,525	+) 2,782
합 계				8,173			38,775	+) 30,602

○ 단가 및 수량 산정기준

- 관련근거 : 서울역 7017프로젝트 기본 및 실시설계 도서 송부

(토목부-22440(2016.11.2.)

○ 신규단가 적용

- 강제협의율 적용 : 90.014% <(낙찰율 80.027% + 설계가 100%)*1/2>

- 관련근거 : 방재시설부-3054(2017.02.23.) 협의율 조정회의 결과 알림

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 보온단열재 자재변경

- 수목의 동해방지를 위해 식재포트 내부면에 설계된 보온용 자재가 경질의 발포폴리스티렌계열의 스티로폼 제품으로 설계되어 있는바, 원형의 식재포트 내부면에 곡선시공이 부적합하여 표면에 은박 필림이 부착되어 있고 휘어짐이 용이한 연질상태의 발포성 폴리에티렌계열의 단열자재로 변경 시행하고 식재포트 수량 감소에 따른 물량정산

○ 방수테이프 부착

- 식재포트 내부에 부착하는 보온용 단열자재의 상단면이 턱(THK=10㎜)을 이루고 노출되며 단열재가 방근층에서 탈락될 시 방근, 방수층 사이로 수분 또는 멀칭재 등 이물질이 침투하여 단열 효과가 저하될 우려가 예상되어 단열재 상단을 방수 테이프로 마감해서 단열기능을 유지하고 방근, 방수, 보온층 상단을 정리하는 효과가 있어 방수테이프의 추가 부착 시행

위 2개 항목의 변경사항을 검토 결과 보온 단열재의 변경 및 포트 상단 방수 테이프 추가시공이 타당한 것으로 판단되므로 실정 보고 후 변경 시행하고 추후 설계 변경에 반영하고자 함.

□ 보고자 의견

○ 식재포트 보온 단열재 자재변경 및 방수테이프 부착에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 실정보고 승인 통보하여 현장 반영하고 향후 설계변경 시 정산 반영 조치하고자 함

붙 임 : 건설사업관리기술단 실정보고 1부.  끝.