투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시서북병원
수신	내부결재
(경유)
제목	서북병원 BL3 실험실 구축공사 폐기물처리 용역 계약변경 시행

1. 원무과-5724(‘17.3.31.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 우리병원에서 시행하고 있는 BL3 실험실 구축공사 폐기물처리 용역 건에 대하여 아래와 같이 변경계약 하고자 합니다.

가. 건    명 : 서북병원 BL3 실험실 구축공사 폐기물처리 용역

나. 계 약 자 : 협신자원주식회사 대표 오원석

다. 계약금액 : 금6,029,200원(금육백이만구천이십원)

라. 계약기간 :‘16.12.8 ~ ’17.2.25

마. 변경내용

구 분	변경전	변경후	증 감	비 고
계약금액	6,029,200원	좌 동	없 음	사후정산
계약기간	‘16.12.8. ~ ’17.2.25	‘16.12.8. ~ ’17.4.22	기간연장	계약기간 만료일 31일 경과후 변경신청으로 지체배상금 467,263원 부과 및 준공시 상계
변경사유	BL3 실험실 구축공사 계속 추진중으로 공사기간(‘17.4.22까지)과 폐기물처리 용역기간을 일치시킴

따로붙임	1. 서북병원 BL3 실험실 구축공사 폐기물처리 용역 기간변경 검토보고 1부.

2. 폐기물처리 용역 계약기간 변경요청 및 합의각서 2부.  끝.

★주무관	차혁진		시설팀장	代차혁진		원무과장	03/31 김종환
협조자	서무팀장	박준영
시행	원무과-5792	(		)	접수		(		)
우	03433	서울특별시 은평구 갈현로7길 49 시립서북병원 3층 원무과 (역촌동)	/	http://sbhosp.seoul.go.kr
전화	02-3156-3093	/전송	02-389-9704	/	chacine@seoul.go.kr	/	부분공개(6)