“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	계약심사서류 보완요청[천호대로(광나루역) 확장공사 설계변경]

1. 토목부-6326호(2017.03.28)와 관련입니다.

2. 상기대호로 계약심사 요청한『천호대로(광나루역) 확장공사 설계변경』에 대하여 다음과 같이 보완 요청 하오니 2017.4.6일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 보완내용

1) 설계변경 전․후 도면

2) 설계변경 공사시방서

3) 설계변경 수량 및 단가산출서(일위대가 및 단가조사서, 견적서 등)

- 설계변경 내역서, 당초 계약내역서

- 내역 전산파일[공사원가 호환규정파일(XML파일)]토목, 조경 분리 제출(신규비목 및 증가물량만 해당)

- 물량 및 단가 증감 대비표

4) 설계변경 시점에 관한 서류

- 변경도면을 발주기관이 확정한 서류

- 변경도면이 필요 없는 경우, 계약당사자간에 설계변경을 합의한 문서

5) 변경단가 협의율 근거 서류(발주기관 요청의 경우 증가 물량, 신규단가에 대하여 적용)

6) 발주기관의 필요한 의한 설계변경시 설계변경 요구 서류

7) 계약상대자 실정보고 서류(첨부 서류 일체)

8) 책임감리 검토보고 서류(첨부 서류 일체)

9) 발주기관 설계변경 보고서(설계변경 사유서)

10)우선시공을 한 경우, 우선시공 승인 문서

11)특정공법(제품)이 있는 경우 선정위원회 심의결과 보고서

※ 대상기준 : 제품 5천만원 초과, 특정공법 1억 초과.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	허원도		토목심사팀장	김종호		계약심사과장	04/03 안호
협조자
시행	계약심사과-7010	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서울시청 서소문별관 제1동 9층)	/	http://seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개