투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	시설공사 준공기한 연기 의뢰(서부지하차도 전체및7차)

우리 본부에서 시행중인 『서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 서부트럭터미널 앞 지하차도 건설공사

2. 공사개요 : 지하차도 건설 B=18.5m, L=1,075m

3. 도 급 자 : 중앙건설(주)

4. 준공기한 연기현황

구 분	도 급 비	착공년원일	당초준공기한	변경준공기한	비 고
7차	8,334,922,280원	‘13.10.8	‘14.4.5	‘14.6.30
전체	68,862,922,280원	‘08.3.10	‘14.4.5	‘14.6.30

5. 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 도급자에 있지 않음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : 공사 일시 중지와 집단민원에 의한 보도공사 지연 등으로 절대공기 부족하여 연기

붙임  1) 준공기한 연기의뢰서 1부.

2) 준공기한 연기보고서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	박천용		광역도로과장	代조양연		토목부장	04/01 노우성
협조자
시행	토목부-6190	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2558	/전송	02-3708-2599	/	park8370@seoul.go.kr	/	대시민공개