★

문서번호	치수과-5666
결재일자	2017.4.5.
공개여부	대시민공개

담 당	하수담당	치수과장	안전건설교통국장
이은주	代이동구	송기민	04/05 박형중
협 조	예산담당	고영용

사업계획 추진 검토 및  실정보고

(화랑로32길14~돌곶이로22길33구간외 1개소 사각형거 보수보강공사)

2017. 04.

안전건설교통국

(치 수 과)

사업계획 추진 검토 및 실정보고

(화랑로32길14~돌곶이로22길33구간외 1개소 사각형거 보수보강공사)

Ⅰ		사 업 개 요

○ 공 사 명 : 화랑로32길14~돌곶이로22길33구간외 1개소 사각형거 보수보강공사

○ 공사기간 : 2017.02.27.~2017.05.27.

○ 계약금액 : 413,095,000원

○ 도 급 자 : ㈜범창건설  대표  이덕재

○ 사업개요 : 사각형거 보수보강 □2.0×2.0~2.9×2.2m, L=708m

- 단면보수(바닥) : 1,284.45㎡

Ⅱ		보 고 사 항

○ 2011년08월 하수암거 정밀점검 시행하고 2015년11월 사각형거 보수보강에  대한 공법선정위원회 자문결과에 따라 사각형거 보수보강을 시행하고 있는 대사관로72~대사관로98 사각형거구간(□2.2×1.3m~2.5×2.2, L=1,020m)중 잔여구간(L=154m)이 콘크리트면의 침식 및 노후화가 심하게 진행된 상태로 재료분리 등 손상상태를 고려하여 장기적 내구성 확보를 위해 본 공사에 포함하여 시행하고자 함.

※ 관련근거 : 안전치수과-20744(2015.11.09.)

○ 대사관로72~대사관로98 사각형거 보수보강 추진 현황

- 2011.08. : 하수암거 정밀점검 시행

- 2015.11.09. : 공법선정위원회 자문

- 2016.05.31. : 일부구간(L=574m) 보수보강공사 완료

- 2017.02.~05.: 일부구간(L=292m) 보수보강공사 시행중

○ 잔여구간 공사물량

연번	구 간	공 종	규 격	연장(m)	수량(㎡)	비고
1	0+840~860m	단면보수(바닥)	B=2.2m,t=30mm	20	44.0
2	0+860~880m	단면보수(바닥)	B=2.9m,t=30mm	20	58.0
3	0+880~920m	단면보수(바닥)	B=2.9m,t=30mm	40	116.0
4	0+920~945m	단면보수(바닥)	B=2.5m,t=30mm	25	62.5
5	0+945~960m	단면보수(바닥)	B=2.9m,t=30mm	15	43.5
6	0+960~994m	단면보수(바닥)	B=2.9m,t=30mm	34	98.6
계				154	429.2

○ 사업예산 활용 내역

총예산액(천원)	공사비(천원) 도급비+폐기물	가용 금액 (천원)
		계	이전비	낙찰차액
493,230	416,825	76,405	6,600	69,805

Ⅲ		검 토 결 과

○ 상기의 대사관로72~대사관로98 사각형거 보수보강 대상물량에 대하여 사업예산중 가용금액(76,405천원)을 활용하여 공사 시행함.

- 이전비(6,600천원), 낙찰차액(69,805천원)

Ⅳ		사업계획 변경 내역

○ 물량변경 내역

구 간	공 종	규 격	수 량 (㎡)		증·감	비 고
			당 초	변경후
0+520~994	단면보수(바닥)	t=30mm	642.40	1,071.60	증)429.20

○ 개략 소요공사비 내역

(단위 : 천원)

공 종	당 초	변경후	증·감		비 고
단면보수(바닥,t=30mm)	90,338	150,694	증	60,356
단면보수(바닥,t=50mm)	144,819	144,819		-
콘크리트 단면제거	28,696	35,891	증	7,195
고압 물세척	1,231	1,643	증	412
부대공	27,995	28,123	증	128
폐기물 처리	3,730	4,647	증	917
제경비 등 기타	120,016	127,413	증	7,397
계	416,825	493,230	증	76,405

4		향후 조치계획

○ 상기와 같이 사업계획 변경에 대하여 도급업체에 작업지시하여 시행하고 물량변경에 따른 소요공사비는 추후 설계변경에 반영, 정산처리 하고자 함.

붙 임 : 1. 위치도 및 현장사진 1부.

2. 설계도면(추가물량 구간) 1부. 끝.