문서번호	기술심사담당관-6723
결재일자	2017.4.5.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제77호

				시 민
주무관	기술지원팀장	기술심사담당관		행정2부시장
오영진	류용열	김홍길		04/05 이제원
협 조
	기술관리팀장		조현석
	토목심사팀장		조임남
	건축심사팀장		도태환

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(3월)

2017. 4.

서울특별시

기술심사담당관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	외부전문가 주관 점검실시
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(3월)

우리시 주요 공사현장을 대상으로 실시하고 있는 「외부전문가 기동점검단」의 `17년 3월 중 활동 결과에 대하여 보고 드림

1. 점검개요

점검일자	2017. 3. 7.(화)	2017. 3. 14.(화)	2017. 3. 25.(토)	2017. 3. 28.(화)
공 사 명	하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사	서울소방행정타운 건립공사	도봉장애인종합복지관 신축공사	도시고속도로 연결 램프(정릉길)설치공사
사업부서	도기본 도철토목부	도기본 건축과	도봉구청 건축과	도기본 토목부
공사기간 (공정률)	`15.03.30. ~ `18.07.26.(37%)	‘16.05. ~ ’18.05. (25%)	‘15.10. ~ ’17.06. (86%)	‘13.12.30. ~ ’17.12.29.(68%)
점검자	· 제일엔지니어링 오해진 · 동해종합기술공사 남상진 · 수성엔지니어링 안순용 (직원 : 기술관리팀 2)	· 다원구조엔지니어링 강정임 · 하우징쿱주택협동조합 기노채 · 태민엔지니어링 이종태 (직원 : 건축심사팀 3)	· 유탑엔지니어링 이세웅 · 한국안전잉네지 권회구 · 성우인종합건축 한효동 (직원 : 건축심사팀 3)	· 시지잉네씨 이봉열 · 유케이이엔씨 유병률 · 한국가설협회 김곤묵 (직원 : 토목심사팀 3)

2. 중점 점검사항

❍ 현장대리인, 책임감리원 등 근무실태

- ONE-PMIS에 작업일보 작성 및 현장내 장비와 인력투입현황 관리여부

- 현장반입 건설기계 임대차 계약서 작성, 대여대금 지급보증서 교부여부 확인

- 현장대리인 및 참여기술자(감리원) 현장근무 여부 확인 등

❍ 가시설 및 토공, 안전물 설치상태 등 시공상태 확인

- 옹벽 및 연결램프 시공 상태 점검

- 터널 갱구부 관리 및 복공판 등 가시설 시공 상태 점검

❍ 구조물에 대한 품질․안전․공정관리 등 시공관리

- 콘크리트 타설, 철근 조립 시공실태 및 구조물 품질관리 실태 점검

- CIP 시공구간 상단부 시공 상태 점검

- 작업공간 주변정리 정돈 등 안전관리 실태 점검

3. 점검결과

□ 총 지적사항

공 사 명	계	안전관리	품질관리	기 타
계	54	28	17	9
하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사	18	10	5	3
서울소방행정타운 건립공사	16	8	6	2
도봉장애인종합복지관 신축공사	12	3	5	4
도시고속도로 연결 램프(정릉길)설치공사	8	7	1	-

□ 분야별 주요 지적사항

안전관리 분야

- STA.840 최하단 4Span 버팀(어스앵커,록볼트)을 설치하지 않아 벽체 변위가 예상되므로 조속히 버팀 설치요함(하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사)

- 본관동 기 시공된 파일이 토압에 의해 횡변위가 발생하지 않도록 현장관리 필요(서울 소방행정타운 건립공사)

- 본관동 보강토 옹벽시공 인근지역 절개지 등 토공사 오픈컷 부위 사면보호 미흡으로 낙석이나 토사 슬라이딩 위험이 있으므로 조치필요(서울 소방행정타운 건립공사)

- PS 띠장구간은 계측이 되지 않고 있어 계측 추가 설치 검토 필요(하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사)

- 엄지말뚝과 띠장사이에 벌어진 곳 강재 채움 필요(하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사)

- STA.745 부근 본선 개착구간 배면 누수 발생으로 보완 필요(하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사)

- 전층 경사로 내․외부 창호 안전난간 설치 및 경사로 손잡이 시설 높이, 규격 등 규정대로 설치 요망(도봉장애인종합복지관 신축공사)

품질관리 분야

- 기초 이음부 철근 누락으로 보완 필요(하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사)

- 입출고선 옹벽구간 주철근의 동일 위치 겹이음 조립 보완 필요(하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사)

- 중앙훈련동 지하2층 콘크리트 옹벽에 마대 및 합판이 섞여 타설됨(서울 소방행정타운 건립공사)

- 전층 단열재 기밀성 유지 미흡(도봉장애인종합복지관 신축공사)

- 옹벽 상부 차량방호벽 균열 유도부가 도로부에만 설치됨(도시고속도로 연결램프[정릉길] 설치공사)

4. 조치계획

□ 지적사항은 점검 당일 시공업체 및 감리단(감독)에 전달하여 시정토록 조치

- 발주부서에서 지적사항 시정 및 현장관리토록 공문으로 통보 조치

붙임 : 점검 주요 지적사례 1부.  끝.