다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	변경계약체결 통보(경의선숲길 건설폐기물)

1. 재무과-15104호(2014.3.29.)와 관련입니다.

2.「경의선숲길 공원조성공사」의 건설폐기물 처리를 위한 계약건에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결되었음을 알려드리오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 변경계약일 : 2014.3.12

나. 변경사항(준공기한 연기)

(단위: 원)

사 업 명	계약금액	준공기한(금차)		비 고
		변경 전	변경 후
경의선숲길 공원조성공사(2단계) 건설폐기물 처리용역(장기계속)	변경없음	2013.10.22. ∼ 2014.03.20	2013.10.22. ∼ 2014.08.16	총차계약기간은 변동없음.

첨 부 : 변경계약체결 통보서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),경의선숲길 경춘선 폐선부지 공원화사업 통합 전면책임감리용역 책임감리 단장
주무관	최송천		공원개발팀장	오대근		공원조성과장	04/01 오순환
협조자
시행	공원조성과-3991	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 2층(서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2065	/전송	0221331081	/	csc1969@seoul.go.kr	/	부분공개(5)