투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	재사용플라자 건립공사 건설폐기물처리용역 계약변경(총차 및 2차) 의뢰

1. 건축부-6059(2017.04.10)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인『재사용플라자 건립공사 건설폐기물 처리용역』에 대하여 아래와 같이 계약변경(총차 및 2차)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 재사용플라자 건립공사 건설폐기물 처리용역

나. 계약기간 : `15. 2.24.~`17. 4.10(총차)/`15.11. 1~`17. 4.10(2차)

다. 계약금액 : 금1,224,660,000원(2차:금246,410,000원)

라. 계 약 자 : ㈜백산이엔티건설 외 1개사

마. 계약변경 내용

구 분		변 경 전	변 경 후	증·감
계 약 금 액	총 차	1,224,660,000원	1,203,390,000원	감 21,270,000원
	2 차	246,410,000원	225,140,000원	감 21,270,000원
계 약 기 간	총 차	2015. 2.24∼2017. 4.10	2015. 2.24∼2017. 4.10	변경없음
	2 차	2015.11. 1∼2017. 4.10	2015.11. 1∼2017. 4.10	변경없음

바. 예산과목 : 조직)기후환경본부 자원순환과, 정책사업)효율적인 폐기물처리,  단위사업)생활폐기물 재활용 극대화, 세부사업)서울 재사용 플라자 조성, 통계목) 시설비

붙임  1. 건설폐기물처리용역(총차및2차) 계약변경 검토보고서 1부.

2. 합의각서 및 계약변경내역서 각 1부

3. 건설폐기물처리용역 총차 및 2차 계약기간 변경 요청 1부. 끝.

	건축부장
주무관	김찬유		환경시설과장	유현수		건축부장	04/10 김진용
협조자	경리과장	최정수
시행	건축부-6063	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)