“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰

1. 공공재생과-3794('17.04.04)호와 관련입니다.

2.「노들섬 문화명소화 조성 기본 및 실시설계용역」에 대하여 아래와 같이 용역 준공기한 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 :「노들섬 문화명소화 조성 기본 및 실시설계용역」

- 계 약 자 : 토포스 건축사사무소 대표 김원영

- 계약금액 : 1,920,000,000원

나. 준공기한 연기 내용

구분	당초	변경	비고
용역기간	‘16. 8.12~’17. 4.12	‘16. 8.12~’17. 7.31	총 110일 연장

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서(합의각서 포함) 1부.

	공공재생과장
주무관	천주영		특화공간조성팀장	안중욱		공공재생과장	04/10 홍선기
협조자	주무관	강전남
시행	공공재생과-3972	(		)	접수		(		)
우	04524	서울 중구 세종대로 110 서울시청 11층 공공재생과	/
전화	02-2133-8708	/전송	02-2133-0885	/	chjy0130@seoul.go.kr	/	부분공개(5)