문서번호	건축부-6059
결재일자	2017.4.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
김찬유		유현수	04/10 김진용
협 조
	주무관			시희식

『재사용플라자 건립공사』

건설폐기물처리용역 계약변경(총차, 2차) 검토 보고

2017. 4.

도시기반시설본부(건축부)

『재사용플라자 건립공사』

건설폐기물처리용역 계약변경(총차 ,2차) 검토 보고

『재사용플라자 건립공사』와 관련하여 건설폐기물처리용역 계약변경(총차, 2차)에 대한 건설사업관리단의 보고에 따른 검토 보고임

1		용역개요

용 역 명 : 재사용플라자 건립공사 건설폐기물처리용역

위    치 : 성동구 용답동 205-1번지외 5필지 일대

규    모 : 지하2층/지상5층, 연면적 16,529㎡

용    도 : 폐기물처리시설(재활용시설)

용역기간 : (총차) 2015.  2. 24 ~ 2017. 4. 10

(2차) 2015. 11.   1 ~ 2017. 4. 10

용 역 비 : (총차) 1,224.660,000원

(2차)    246,410,000원

용 역 사 : ㈜백산이엔티건설, ㈜한진건설

건설사업관리용역사 : 펨코엔지니어링, 아이티엠코퍼레이션

현공정률 : 100%

2		총차 및 2차 변경계약 검토

관련근거 : PC재사용17-251호(2017. 4. 7)호

총차 및 2차 변경계약

- 사 유 : 재사용플라자 건립공사 건설폐기물용역 준공을 위한 내역 정산에 대한

변경계약 요청임

계약금액 변경내용 : 감 21,270,000원

구 분	계약금액			비 고
	변 경 전	변 경 후	증 감
총차	1,224,660,000원	1,203,390,000원	감 21,270,000원
2차	246,410,000원	225,140,000원	감 21,270,000원

계약기간

구 분	용 역 기 간			비 고
	변 경 전	변 경 후	증 감
총차	‛15.02.24~‛17. 4.10	‛15.02.24~‛17.04.10	변동없음
2차	‘15.11.01~’17. 4.10	‘15.11.01~’17.04.10	변동없음

3		감리자 검토의견

재사용플라자 건립공사 건설폐기물처리용역 준공을 위한 내역 정산 변경으로 총차 및 2차 계약 변경은 적정하다고 판단됨

4		처리의견

건설폐기물처리용역 준공 내역 정산 변경으로 상기와 같이 총차 및 2차에 대한 변경계약을 추진코자 함

5		향후 추진계획

2017. 4월 : 용역 계약변경

2017. 4월 : 용역 준공

붙 임  건설폐기물처리용역(총차 및 2차) 계약변경용역 요청 검토보고 1부.  끝.