투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(설계변경 실정보고 및 작업지시)

○ 업무지시현장 :  만리재로 보행 환경개선 전기공사 (합) 고려공업기업사

○ 지 시 내 용

1. 서울시정에 협조하여 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 시공중인 『만리재로 보행환경 개선 전기공사』와 관련하여 유지관리부서인 구청과의  협의사항 및 도로관리과 추가 반영 내용을 통보하니 실정보고 및 현장 시공에 만전을 기하여 주시기 바라며,

3. 작업시 “건설공사장 중점관리 20대 항목”을 준수하여 안전사고 예방 및 시민들에게 불편을 주지 않도록 공정관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

구 분	당 초	변 경	비 고
보행등	미설치	설 치(LED 50W)	구청협의
등주 높이 및 간격	9m, 20~25m	10m 27~30m (현장여건에 따라 조정)	“
교차로 횡단보도 조도	전구간 동일	상향(1 → 2등용)	“
안정기 수납커버	설 치	미 설 치	“
청파로 개량	미반영	반 영	도로관리과 추가 반영 요구

끝.

주무관							성호준			열빛총괄과장					04/11 유병기
협조자
시행			설비부-5950									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로8(무교동 96) 프리미어플레이스빌딩 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8602						/전송			02-3708-8659					/	junilove@seoul.go.kr												/	대시민공개