투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	조달청장(예산사업관리과장)
(경유)
제목	물가변동(제1회)으로 인한 계약금액 조정 사전 검토의뢰 [하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사]

우리 본부에서 시행중인「하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사」는 총사업비 관리 대상 사업으로 「총사업비 관리지침」에 의거 붙임과 같이 물가변동으로 인한 총사업비를 조정하고자 사전검토를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

나. 계약번호 : 15*******00

다. 공사기간 : 2015.03.30. ~ 2019.03.28

라. 계약금액 : 68,082,792,000원

마. 물가변동 적용내용

1) 물가변동 경과기간 : 2015.03.17.~2016.09.01.(533일)

2) 계약금액               : 68,082,792,000원

3) 물가변동 적용제외 금액 : 14,369,870,000원

4) 물가변동 적용대가      : 53,712,922,000원

5) 물가변동 조정율        : 3.34%

6) 물가변동 등락금액      :  1,794,011,000원

7) 선금급 공제금액        :     86,135,000원

8) 물가변동 조정금액      :  1,707,876,000원

붙 임 : 물가변동(제1회) 검토자료 1부(별도 송부). 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	한재호		주무관	김찬오		궤도과장	최진규		도시철도토목부장	04/11 代윤방식
협조자
시행	도시철도토목부-4643	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02)772-7306	/	jh1004@seoul.go.kr	/	대시민공개