문서번호	고도정수반-444
결재일자	2014.4.2.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	고도정수반장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
라승보	이임섭	윤석우		전결 04/02 정득모
협 조	급수부장		이상홍
	배수과장		박기범

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』 준공기한 연기 검토 보고

2014. 4.

상수도사업본부

(시설안전부)

작성자	시설안전부장:윤석우(☎1501), 고도정수반장:이임섭(☎1450), 담당:라승보(☎1456)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

준공기한 연기 검토 보고

“올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사” 현장 책임감리원으로 부터  준공기한 연기 요청이 있어 이에 대한 검토 보고임.

공사개요

□ 공 사 명 : 올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사

□ 공사규모 : 터널 D2200mm,L=1,416m(송수관 D1500mm,L=1,511m)

□ 공사기간 : ’11. 9. 8. ~ ’14. 4. 5.(4차분 ’14. 3. 21.~ 4. 5)

□ 도 급 비 : 15,464백만원(4차분 889백만원)

□ 시 공 사 : 중흥건설(주) 외 1개사

□ 감 리 사 : (주)건화

감리사 준공기한 연기 보고

☞ 관련문서 : 공사(4차분) 준공기한 연장요청 검토 보고〔건올감 2014-104(2014. 3. 31.)〕

□  공사기간 연장 요청 내용

구 분	당 초	변 경	증·감
전체분	’11.09.08. ~ ’14.04.05.(941일)	’11.09.08. ~ ’14.06.30.(1,027일)	증 86일
4차분	’14.03.21. ~ ’14.04.05.(16일)	’14.03.21. ~ ’14.06.30.(102일)	증 86일

- 준공기한 연기사유 : 기존관 연결 무단수 공법 적용에 따른 기간 소요

□ 무단수 공법 적용 검토 현황

- 기존관 연결공사 공법 변경(단수→무단수)에 따른 공기 증가

․ 동작대교 남단에서 시행되는 기존관 연결공사가 당초 설계시 단수후 기존관(D2200mm)과 신설관(D1500mm)를 연결코자 하였으나, 수계전환 불가 및 수질사고 예상으로 무단수(Line Stopping)로 변경 시행

․ 이에 대한 사업계획변경 심의 완료함(기술심사과-5638, 2014.3.28.)

□ 변경 공종별 공사소요 일수

구 분		당 초 공 기	변 경 공 기	증가 일수
소 계		2일	88일	86일
기존관 연결 (Line Stopping)		2일	79일	77일
세부공종	우회로,가설휀스,시험터파기	-	9일	9일
	터파기 및 가시설	-	23일	23일
	가배관 설치	-	7일	7일
	Line Stopping 설치 및 점검	-	9일	9일
	D2200 중간밸브설치 및 신설관 분기	2일	5일	3일
	가배관 및 Line Stopping 철거	-	6일	6일
	되메우기	-	5일	5일
	휀스철거,헬기장 복구,뒷정리	-	15일	15일
퇴수변 및 퇴수관로 설치		-	9일	9일

책임감리원 의견

□ 수정예정공정표 검토 결과 추가 공기 반영은 타당함

- 상기 추가 공기 발생은 당초 설계에 없는 공종 추가로 발생한 건으로 소요공정을 산출한 공정예정표 검토 결과 적정하므로

- 잔여공사가 정상적인 시공이 이루어 질 수 있도록 시공사 요청안과 같이 공사기한을 2014. 6. 30일 까지 연기함이 타당할 것으로 사료됨

공사관리관 의견

□ 기존관 연결을 단수 → 무단수 공법 적용에 따른 소요공기 증가 사항으로 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 하며

□ 준공기한 내 관로점검 및 관세척을 완료하여(배수과 협조) 통수에 차질이 없도록 하고자 함.

< 전체분 준공기한 연기 >

․ 당  초 :  2011. 9. 8 ~ 2014. 4. 5

․ 변  경 :  2011. 9. 8 ~ 2014. 6. 30(86일 연기)

< 4차분 준공기한 연기 >

․ 당  초 :  2014. 3. 21 ~ 2014. 4. 5

․ 변  경 :  2014. 3. 21 ~ 2014. 6. 30(86일 연기)

- 연기사유 귀책소재 : 발주청

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 : 1. 시공사(중흥건설(주)) 및 책임감리원((주)건화) 공사연기 관련공문 1부.

2. 사업계획변경 조정위원회 심의결과 통보 1부. 끝.