문서번호	설비부-3482
결재일자	2014.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★환경설비과장	설비부장
박태욱		이달영	04/02 박기형
협조
	환경시설과장		박희천

「서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업」

전면 책임감리용역 4차 발주 계획 보고

2014. 03.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

「서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업」

전면 책임감리용역 4차 발주 계획 보고

「서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업」의 원활한 추진을 위하여 전면 책임감리용역 4차 발주 계획을 보고드림.

용역개요

❍ 용 역 명 : 서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 전면 책임감리용역

❍ 용역규모 : 분뇨처리시설 4,000톤/일 신설, 기존시설 철거 및 상부공원화

❍ 용역금액 : 총괄 금2,048,296천원

❍ 용역기간 : 총괄 2012. 01. 02 ~ 2015. 03. 16

❍ 감 리 사 : (주)도화 엔지니어링외 1개사

계약현황

(단위:천원)

구 분	총괄	1차	2차	3차	4차(금차)	장래분
감리기간	2012.01.02.∼ 2015.03.16	2012.01.02.∼ 2012.07.16	2012.07.17.∼ 2013.01.31	2013.02.01.∼ 2014.04.10	2014.04.11.∼ 2015.02.02	2015.02.03.∼ 2015.03.16
감리금액	2,048,296	45,000	385,089	675,436	455,099	487,672

예산현항

❍ 재배정 예산 : 870백만원(2014년)

❍ 예산과목 : 도시안전실 물재생시설과, 물재생시설 개선 및 관리, 물재생시설 개선,                 서남분뇨처리시설증설 및 현대화사업, 감리비

※ 연도별 재배정 현황

(단위:천원)

구 분	계	2011	2012	2013	2014
계	2,171,000	45,000	386,000	870,000	870,000
감 리 비	2,171,000	45,000	386,000	870,000	870,000

발주계획

❍ 발주차수 : 4차(장기계속사업)

❍ 발주금액 : 455백만원

❍ 감리기간 : 2014.04.11.~2015.02.02

❍ 투입계획

구 분	직 책	분 야	투입인원	비 고
상 주	책임감리원	토 목	1
	보조감리원	토 목	1
		안전감리원(토목)	1	‘14’2.17～‘14.7.24
		기 계	1	등급조정 (감리사→감리사보)
		전 기	1	등급조정 (고급→중급)

※ 공사진척 현황 등 현장 실정을 감안하여 감리원 등급을 조정하여 4차 감리 발주

– 당초 공사준공일(2014.2.2.)이 2차 공사 준공일로 설계변경되므로, 전체 공사기간 연장 예정

<안전감리원 증원 배치>

◆ 관련근거 : 토목부-923호(2014.1.16.) 「2014년 전문감리원 추가배치 집행계획 확정 통보」

◆ 안전감리원 배치 : 설비부-1544호(2014.2.11.)「책임감리원 교체 및 보조감리원 배치 지시」

- 배치기준 결정 우선 수위 : 안전 및 구조검토가 수반되는 주요공종(가시설, 구조물 등) 공사

- 감리비 반영금액 : 60백만원

- 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시기반시설본부(일반회계), 공사장 안전관리대책추진, 감리비

조치계획

❍ 상기 내용과 같이「서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업」의       공사진척 현황 등을 감안하여 감리원 등급을 조정하여 책임감리      용역 4차를 발주하고, 총괄 변경 설계서는 전체 공사기간 연장 확정      후 별도 보고.

붙임 : 1) 감리단 보고서 1부.

2) 4차 설계내역서 1부.

3) 감리원 투입 계획표 1부. 끝.