투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	건설폐기물처리 용역 설계변경 시행(강남순환도로4공구, 총차2회, 4차 1회)

1. 우리본부에서 시행하는 「강남순환도로4공구건설공사 건설폐기물처리용역」에 대하여 설계변경(총차 2회, 4차 1회)을 시행하고 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 강남순환도시고속도로4공구 건설공사 건설폐기물처리용역

(총차 2회, 4차 1회)

나. 공사규모 : 도로개설 폭4~ 8차로 연장 2.48km

다. 용역사 : ㈜방태 김용남

라. 예산과목 : 도로건설, 도시고속도로망확충(도시개발특별회계),  강남순환도시고속도로건설, 시설비 및 부대비, 시설비

마. 설계변경 내역

- 총차(2회)

구 분	당 초	변 경	증. 감	비 고
용역기간	2010.3.8. ~ 2014.5.31	2010.3.8.~ 2016.5.31	2년연장 (24개월)
용 역 비	1,156,440,000	1,156,440,000	변동없음

- 4차(1회)

구 분	당 초	변 경	증. 감	비 고
용역기간	2014.04.01. ~ 2014.5.31	2014.04.01.~ 2015.5.31	1년연장 (12개월)
용 역 비	300,000,000	300,000,000	변동없음

바. 변경사유 : 강남순환도로4공구 건설공사 공기연기에 따라 건설폐기물처리용역 기간연장(총차 2년, 4차 1년)

붙임 : 1. 강남순환도로4공구 건설공사 건설폐기물 처리용역 보고서 1부.

2. 건설폐기물 처리용역 변경 설계서 각 1부.

3. 책임감리단 검토보고서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),건설총괄부장
주무관	박웅교		도시고속도로과장	성선주		토목부장	04/02 노우성
협조자	주무관	시희식		계약2팀장	홍연화
시행	토목부-6302	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-8664	/전송	3708-2599	/	pkyo2425@seoul.go.kr	/	대시민공개