투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(휴일 및 야간작업(2017.4.15~4.16) 승인 알림)

1.업무지시현장 : 서울역 7017 프로젝트 건설공사 주식회사 진우엔지니어링코리아

2.작 성 일 자 : 2017-04-13

3.지 시 내 용 :

1) 서울역 7017 프로젝트 건설공사에 대한 휴일작업승인요청서(2017-휴일-15호, 2017. 4.12.)와 관련입니다.

2) 위 호와 관련 휴일 및 야간작업 승인요청에 대하여 아래와 같이 승인하니 책임건설사업관리기술자께서는 현장 품질 및 안전관리 등을 철저히하여 안전사고가 발생하지 않도록 감리업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

○ 작업일시

- 휴일작업 : 2017. 4.15.(토) ∼ 4.16.(일) 07:30∼17:00

- 야간작업 : 2017. 4.15.(토) ∼ 4.16.(일) 22:00∼05:00

○ 작업내용

【휴일작업】

- 기초 철근 조립(P23,P24) 및 연결계단-2 거푸집 조립

- 만리동 교통섬 토공 및 경계석 설치

- 한양성곽길 포장 및 교각 중성화방지제 도포(P3~P8)

- 보도용 난간 선형 작업(램프-B,D)

- 강재 보수보강(P10~P15) 및 도장(P3~P6)

- 포트 수목식재, 배양토 포설, 부대공사 등

【야간작업】

- L형측구 면정리(퇴계로·만리재로 구간)

- 철도구간 교각 비계 및 공중비계 해체(P17~P18)

○ 근 무 자

- 휴일근무자 : 박성호(4.15), 김형식(4.16)

- 야간근무자 : 단순작업으로 감리원 미배치(비상체계 유지)

○ 기타사항 : 공사시 작업차량, 작업자 안전관리 및 각종 안내간판 등 교통안전 시설물 설치 철저

붙임 : 휴일 및 야간작업 승인요청서  1부.  끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							박웅교			토목총괄과장					이동훈					토목부장					04/13 김영수
협조자				주무관						이상근					주무관							이상욱A
시행			토목부-7773									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		3708-2547						/전송			3708-2599					/	pkyo2425@seoul.go.kr												/	대시민공개