문서번호	급수운영과-6786
결재일자	2017.4.14.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김희철	한호진	04/14 전명수
협 조

준공기한 연기 보고(신설-200,201,202)

명에 의거 송파동 외 11개동 상수도공사 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 보고합니다.

1. 공사 현황

- 공 사 명 : 2016년 송파동 외 11개동 상수도공사(장기계속단가계약)

- 급수공사 기한 연기 내역

지시번호	공사위치	공사개요	기존 공사기간	변경 공사기간	현장 상황
신설-200	삼전동 45-14	D=30** L=6*	2017.4.05.~ 2017.4.14.	2017.4.05.~ 2017.5.13.	공사지연으로 4월말 비계 철거 예정
신설-201	송파동 136-16	D=50** L=5*	2017.4.05.~ 2017.4.14.	2017.4.05.~ 2017.5.13.	공사지연으로 4월말 비계 철거 예정
신설-202	송파동 136-16	근생용 벽체계량기 설치	2017.4.05.~ 2017.4.14.	2017.4.05.~ 2017.5.13.	공사지연으로 4월말 비계 철거 예정

2. 연기 사유 : 신축공사 현장으로 신축건물 공사 일정 지연으로 현재 비계철거가 되지 않은 상황이며 수요가(건물주)가 급수공사일 연기를 요청함

3. 지체상금 부과여부 : 미부과

4. 조치내용

- 상기와 같이 수요가의 급수공사일정 연기 요청함에 따라 변경된 공사 기간을 ㈜성광씨앤씨 대표 최병초에게 통보하고자 합니다.

붙  임 : 현장사진 1부.  끝.