문서번호	정수시설과-1417
결재일자	2017.4.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김종원		김긍채	04/18 임철수
협 조
	주무관			함인석

『인조잔디구장 조성공사』

감독 수행 보고(1차)

2017.  4.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

『인조잔디구장 조성공사』

감독 수행 보고(1차)

인조잔디구장 조성공사 감독업무 수행중 설계도서 및 현장굴착 결과에 따른 실정보고 및 조치의견을 보고 드림

□ 공사개요

○ 공사명 : 인조잔디구장 조성공사

○ 공사내용 : 인조잔디 기반조성공사(104×69m)

- 토공(터파기 및 잔토처리운반) 2,227㎥, 포장공 7,335㎡ 등

○ 사업비 : 900백만원

- 공사비 : 230,555천원(도급비 225,905천원, 관급비4,650천원)

- 인조잔디 : 509,782천원

□ 현장실정및 검토결과

1. 당초설계에는 기층을 쇄석골재로 포설 및 다짐으로 설계되어 있으나, “쇄석골재 보다 다짐율이 좋은 혼합골재로 포설 다짐하는 것이 효율적이다”고 판단되어, 쇄석골재를 혼합골재로 변경하고자 함

검토회의 개최

- 회의일시 및 장소 : ’17. 4. 13 / 현장사무실

- 회의참석자 : 원수관리과 한충규, 정수과 김동우, 정수시설과 김종원,   함인석 주무관, 현장소장

- 회의내용 : 당초설계된 기층재(쇄석골재→혼합골재)변경 건

· 당초 : 쇄석골재(13mm-10cm, 25mm-20cm)포설 및 다짐

· 변경 : 혼합골재(40mm 이하 –15cm)포설 및 다짐

- 검토회의 결과

· 쇄석골재는 입도가 일정한 골재로서, 침투수 효율을 높이는 유공관 등

설치시 주로 사용되나, 본공사는 배수블럭을 설치하여 침투수가 미미하므로

쇄석골재보다 공극율이 낮고 다짐율이 높은 혼합골재를 사용하는 것이 합당

하다고 판단 됨

· 운동장 굴착결과, 기존 혼합골재층이 얇게 형성되어 있으므로 기층의 두께를   당초 25cm에서 15cm로 포설하고 다짐을 하는 것이 타당 함

당 초	변 경
(55m/m) (Ø13m/m) (Ø25m/m)	(Ø40m/m이하) 지정포장면 (55m/m)

2. 사토장 잔토  정리작업비 반영

- 우리센터 장래부지인 사토장의 정리작업이 필요함으로 설계에 반영코자함.

사토장 정리작업 사진

3. 기존 측구배수로에 설치된 살수용 배관을 경계석 후단으로 이설(60m)하고 미설치 구간 (260m)은 살수용 배관을 설치하여 하절기  인조잔디구장 이용에 불편함이 없도록 함.

도면	현장사진
이설 살수용배관 위치

살수용 배관

기존살수용배관

4. 기존 배수로는 인조잔디구장내 빗물을 처리하고 우기시 운동장외곽에서 잔디 구장으로 토사유입이 되지 않도록 경계석 후단에 배수로 설치하고자 함(배수로안으로 상수도관 부설).

도 면
사 진

배수로신설

녹지대경사면

토사,낙엽유입

인조잔디구장

5. 기존 측구장 98×64m에서 국제 축구장 규격(100×60m이상)인 100×64m로 조성으로 하고자 함.

□ 설계변경 예상금액 : 약 13,286 증액

공종	규격	수량		단위	설계금액(천원)
		당초	변경		당초	변경	증감
합 계					47,581	57,209	9,628
1.터파기및포장				㎥
하부기층	⏀25mm T20cm	1,467	0	㎥	35,147	0	-35,147
상부기층	⏀13mm T5cm	366	0	㎥	9,779	0	-9,779
혼합골재	⏀40mm이하 T15cm	0	1,098	㎥	0	30,853	30,853
터파기 및 잔토처리(감)	감소물량	735		㎥	2,655		-2,655
소계		1,833	1,098		47,581	30,853	-16,728
2. 사토장정리
사토장정리	기계100%	0	1,472	㎥	0	674	674
소계			1,472			674	674
3.수도관설치
수도관 밸브노즐설치	50mm	0	320	m	0	2,024	2,024
소 계			320		0	2,024	2,024
4. 측구배수로
측구배수공설치	300×200	0	348	m	0	23,658	23,658
소 계			348			23,658	23658

(57,209-47,581=9,628)×(1.38공과잡비율) = 13,286천원

□ 보고자 의견

○ 1~5. 검토결과을 반영한 시공이 되도록 업체에 선 작업지시하고, 향후 설계변경하여 정산코자 함

○ 운동장 크기 변경에 따른 인조잔디 구매물량 추가사항은 잔디업체 결정시 증가된 물량에 대하여 설계변경하여 설치코자 함

- 신규공종에 대한 단가는 설계금액×낙착율을 적용한 단가로 협의코자 함