투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시 서부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	교통안전 시설물 원인자 부담공사 기간변경 요청

1. 서부도로사업소 도로보수과-5153호 『교통안전시설물 원인자 부담공사』와 관련입니다.

2. 위 호로 교통안전 시설 원인자 부담공사 승인된 사항에 대하여 아래와같이 변경요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 공사기간

- 당    초 : 승인일로부터 2013.12.31일까지

- 변    경 : 2014.12.31까지

- 변경사유 : 공사기간 준공 연장에 따른 변경.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이병환		터널건설과장	명경출		토목부장	04/02 노우성
협조자	주무관	박근우
시행	토목부-6340	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울시 중구 덕수궁길15 서소문별관 2동3층 서울시 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2569	/전송	02-3708-2599	/	topseoul@seoul.go.kr	/	대시민공개