문서번호	하천관리과-6557
결재일자	2017.4.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
실무사무관		하천계획팀장	하천관리과장
이병정		이승우	04/19 손경철
협조

하천 통합관리방안 연구 용역

준공기한 연기 검토 보고

2017. 4.

물순환안전국

(하천관리과)

하천 통합관리방안 연구 용역

준공기한 연기 검토 보고

용역 준공전 시민공청회를 개최하여야 하나 대통령 선거일(‘17.5.9) 전 60일부터 선거법상 공청회가 제한행위에 해당되어 준공기한을 연기하고자 함

□ 사업개요

○ 용역기간 : 2016. 3. 8. ~ 2017. 5. 15.

○ 용 역 사 : (재)서울연구원

○ 용 역 비 : 171백만원

○ 과업내용

- 하천시설물 조사 및 DB구축

- 설치시설물의 적정성 및 치수안전성 평가기준 마련

- 시설물 설치기준 및 관리방안(조직) 마련

□ 준공기한 연기

○ 준공기한 연기내용

구 분	과업기간	용역비	비고
당 초	’16.3.8. ~ ’17.5.15.	171,000천원	용 역 비 변동없음
변 경	’16.3.8. ~ ’17.8.16.

○ 연기사유

- 용역 준공전에 하천 통합관리방안에 대한 시민들의 의견수렴을 위한 시민공청회를 계획하였으나

- 대통령선거일(‘17.5.9) 전 60일부터 시민공청회가 선거법상   제한행위에 해당되어 시민공청회 이행 등을 위한 추가 과업기간이 필요하여 준공기한을 연기하고자 함

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 조치계획

○ 과업 수행에 차질이 없도록 위와 같이 준공기한을 연기하고자 함.  끝.