보고서(급수공사 연기)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
최호림	代김종필토	04/20 장종욱
협 조

문서번호 :	급수운영과-8819

노원구 상수도공사 감독업무 수행(********* 급수공사) 중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2017.  4. 20.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 최 호 림

제목 : 급수공사 연기 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2016년 2차 노원구관내 급수공사(장기계속단가계약)

연번	주 소	수요가명	공사기간	지시번호	비 고
1	*************	***	2017.4.6.~2017.4.21.	신설-9

□ 연기요청사항

연번	주 소	수요가명	연기요청 사유	공사 연기기간	요청인
1	*************	***	건물내부 옥내배관 미설치로 연기	2017.5.9.	***

□ 검토결과

○ 신축건물 인입급수관 부설공사 시행중 건축현장 사정으로 옥내급수관이 미설치되어 세대별계량기설치가 불가하여 부득이 수요가로부터 급수공사 연기요청 한 건으로서 공사기간내 공사가 어려워 아래와 같이 공사기간을 연기하고자 합니다.

연번	주 소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	*************	***	2017.4.6.~2017.4.21.	2017.4.6.~2017.5.9.

○ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.