문서번호	한양도성도감-4378
결재일자	2017.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장		문화본부장
정윤모	곽동진	심말숙		04/24 고홍석
협 조

「남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성 설계공모 관리용역」

용역계약 변경(기간 연장) 계획

2017. 4.

문  화  본  부

(한양도성도감)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

「남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성 설계공모 관리용역」

용역계약 변경(기간 연장) 계획

「남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성 설계공모 관리   용역」의 작품 심사 및 입상작 발표 등 일정이 지연 시행됨에 따라   용역 결과의 내실 등을 기하기 위하여 용역기간을 연장하고자 함

Ⅰ		용역 개요

□ 용 역 명 : 남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성 설계공모 관리용역

□ 용역기간 : 2016.07.08 ~ 2017.04.30.

□ 수행기관 : ㈜디자인오아시스

□ 계약금액 : 124,872,800원

□ 주요 과업내용

○ 설계공모 시행을 위한 기본방향 설정 및 사전 준비

○ 위원회(남산 TF팀, 심사위원회 등) 운영 지원

○ 설계공모 추진(지침서 및 과업내용서 작성 등), 홍보(홈페이지 제작 등)

○ 설계공모 실시(응모 접수, 질의응답, 작품접수 및 심사)

○ 작품전시 및 작품집 발간 등 공모결과의 활용방안 지원

Ⅱ		용역 변경 계획

□ 변경 내용

○ 용역 기간 연장(1개월 연장)

당 초	변 경
2016.07.08 ~ 2017.04.30	2016.07.08 ~ 2017.05.31

○ 계약금액 변경 : 없음

□ 용역 기간 연장 사유

○ 성벽 박굴 유구를 원형대로 노출·보존하는 현장유적박물관 조성은 유사  사례가 없는 사업으로서, 전문가 TF팀 자문회의 및 심사위원회 구성 등 사전절차 이행에 장기간이 소요됨

○ 이로 인해 설계공모의 작품 심사 및 입상작 발표 등 일정이 당초 계획  보다 지연 시행됨에 따라 용역 결과의 내실 등을 기하기 위하여 용역기간 연장

□ 귀책사유 : 서울특별시

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		조치 의견

□ 용역 수행 업체로부터 용역기간 연장에 대한 합의각서가 제출되었고, 용역 결과의 내실을 기하기 위하여 용역기간을 연기하는 것이 타당할 것으로  판단되어 계약변경하고 용역에 만전을 기하고자 함

Ⅳ		향후 계획

□ 2017.04. : 계약변경 의뢰(재무과)

□ 2017.05. : 용역 준공

붙임 : 용역 수행업체 합의각서 1부. 끝.