투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	현대건설주식회사(망우~금곡 복선전철 제1공구 노반신설공사 현장사무소)귀중
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 준공기한 변경 승인

1. 현건 CY96-2017-3호(2017.02.28.) 및 현건CY96-2017-5호(2017.04.20.)와 관련입니다.

2. 망우~금곡 복선전철 제1공구 교통안전시설(노면표시) 원인자 부담공사 준공기한 연기 요청에 대해 아래와 같이 승인하오니,

3. 「교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항」 및 「노면표시 시방서」규정에 따라 공사를 시행하여 주시고 공사완료 후 T-GIS시스템 입력 및 준공확인을 요청하시기 바랍니다.

가. 승인기간 연장

공사명		망우~금곡 복선전철 제1공구 교통안전시설 원인자부담공사(노면표시)	비고
공사기간	당초(1차변경)	2010.04.01.~ 2017.04.28.	공사관리번호 2010-1108-197
	2차변경	2010.04.01.~ 2017.06.30.
연기사유		신규 교통규제 건에 의한 기간연장

끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	민병훈		도로보수과장	04/25 이상호
협조자
시행	도로보수과-1994	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동)	/
전화	02-2210-1538	/전송	02-2210-1549	/		/	대시민공개