문서번호	시설과-1067
결재일자	2014.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	동부공원녹지사업소장
김재희		변규열	04/03 이춘희
협 조
	시설팀장			홍순철
	주무관			김승환

「타슈켄트 서울공원 조성공사」 공정회의(3.27) 결과보고

2014. 04

동부공원녹지사업소

(시   설   과)

「타슈켄트 서울공원 조성공사」

공정회의(03.27) 결과보고

회의개요

○ 일시 및 장소 : '14.3.27(목) 16:00~17:30

○ 참 석 자 : 7명

- 동부공원녹지사업소 : 이춘희(동부공원녹지사업소장), 변규열(시설과장), 홍순철(시설팀장), 김재희(공사 담당)

- 시  공  사

․ 원도급사 : 창성그린개발 대표 조구상

․ 하도급사 : 이오씨 이창열사장, 김경환이사

○ 회의내용

- 공사 현황보고(현장 사진 등)

- 식재공사 설계변경 및 현지 수목 실태 보고

- 공사 준공 시기 및  공사 일정, 소요예산 검토 보고.

회의내용 및 결과

❍ 공사현황 보고

- 3월 중순 현재 전통시설물 90% 완공 4.15까지 완료예정

- 포장, 식재 등 잦은 강우로 인하여 공기에 일부 차질 예상됨

- 5.10일까지 공사 완료 5.20일까지 공사 뒷마무리 예정

‣ 현지 기후 여건으로 인하여 5월 말까지 공기 연장 필요

❍ 식재공사 설계변경

- 담장 등 시설물과 위치가 중첩된 수목 위치 변경

- 반송 등 일부 수급 불가 수목 수종 변경(반송→배롱나무)

- 관목 및 초화류 군식 형태로 식재 위치 변경 및 수량 일부 변경

- 서석지 내 부래옥잠 등 수생식물 추가 식재 및 서석지 주변 등 녹음수 배치

- 기존 수목명패는(목재) 내구성이 약하고 고가이므로 알루미늄,아크릴 재질로 변경(한글, 우즈벡어 병기, 학명 표기 할 것)

‣ 현장 여건에 맞게 식재 및 설비공사 설계변경 시행

❍ 설계보완 및 기타사항

- 준공표지판, 시설 안내판은 현장 반입되어 있으며 수목명찰은 제작 후 추후 반입 예정

- 민속물, 온돌 설치 등 설계보완사항은 시공사 의견 참고하여 정리할 것

- 전축문 전면 상단에 “서울공원” 명판 설치는 공사에 포함하여 설치

❍ 공원 유지관리

- 지역 주민이 참여하는 공원관리단 구성하여 공원 관리/감독하는 방안 검토

‣ 유지관리방안 작성시 시공사 의견수렴하고 주우즈벡 한국대사관 및 타슈켄트 시와 협의 할 것

검토의견

❍ 타슈켄트 현지 잦은 강우로 인하여 5월말까지 공사 기간 연장 시행

❍ 수목식재 및 심정에 추가되는 설비는 현장 여건을 반영하여 설계변경 시행

❍ 설계보완사항 및 유지관리방안에 대하여 고려인 문화협회 및 타슈켄트시와 추후 협의

붙  임 : 공정회의 보고자료 1부.  끝.