함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사 실정보고에 따른 회신 (2016년 도봉,노원구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사)

1. 이준 북부-1704-10(2017.4.26.)호 관련입니다.

2. 귀 사에서 위탁감독중인 『2016년 도봉,노원구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사』의 실정보고에 대한 검토 결과를 다음과 같이 회신하오니 공사감독업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 하수관거 배수분구공사 구간내에 설치된 노후밸브(D=200mm)에 대하여 포장완료후 굴착불가로 향후 중복굴착에 따른 예산낭비 및 교통방해를 사전에  방지코자 포장전 노후밸브(D=200mm, 1988년)를 교체하시기 바라며,

나. 위 사항의 검토의견에 대하여 귀 사의 의견이 타당한 것으로 검토되어 승인 통보하오니, 안전시공을 최우선시 하시고 추후 설계변경시 반영하시기 바랍니다.

첨부 : 현장실정보고서 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	이준엔지리어링(주) 대표 나석근,㈜상명건설 대표 김학진
주무관	최용진		급수운영과장	04/27 장종욱
협조자
시행	급수운영과-9500	(		)	접수		(		)
우	01137		/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/		/	대시민공개