문서번호	주차계획과-5624
결재일자	2017.4.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주차시설팀장	주차계획과장
금종융		전태호	04/27 오진완
협조

관악초교 지하주차장 건설 (관악구) 예산교부 검토

2017. 4.

도시교통본부

(주차계획과)

관악초교 지하주차장 건설 예산교부 검토

관악구에서 추진중인『관악초교 지하주차장 건설사업』관련 ‘17년 예산 편성된 주차장 사업비(시비) 교부 요청함에 따른 검토결과 보고

Ⅰ. 사업개요

○ 위    치 : 관악구 청룡4길 49 (봉천동 920, A=2,240㎡)

○ 규    모 : 주차면수 151면 (지하1~2층, 연면적 4,600㎡)

○ 총사업비 : 6,001백만원 (시비 3,601, 구비 2,400)

구 분	총사업비	투자실적	투자계획		비고
		‘13	‘17	‘18
계	6,001	1,955	2,618	1,428
시 비	3,601	1,173	1,000	1,428
구 비	2,400	782	1,618	-

○ 사업기간 : ‘16.1 ~ ‘18.8

Ⅱ. 추진현황 및 향후계획

○ ‘12.8.         : 시 투자심사

○ ‘13.4.         : 시 교육청 투자심사

○ ‘13.7.         : 중앙(교육부) 투자심사

○ ‘13.11.        : 시비 교부 (1,173백만원)

○ ‘15.12.        : 복합화사업 협약체결(구,교육지원청,학교)

○ ‘16.1~’16.10 : 기본 및 실시설계용역

○ ‘16.12~’18.8 : 공사 시행 (공정율: 6.2%)

○ ‘17.2~4       : 도시계획시설(주차장) 중복결정 협의(시,구)

○ ‘17.5.          : 도시계획시설(주차장) 결정

Ⅲ. 세부 검토 내역

□ 관악초교 지하주차장 건설 시비예산 교부 요청

- 관련공문 : 2017년 주차장건설사업 시비보조금 배정요청

: 관악구 교통행정과-24624호 (‘17.4.24)

□ 주차장 분야별 사업비                             (단위: 백만원)

구 분		총사업비	시 비	구 비	발주시기	비고
계		6,001	3,601	2,400	-
설계용역	설계용역	263	158	105	‘15.12
공사발주	토목․건축	5,443	3,266	2,177	‘16.11
	전 기
	소방․전기
	통 신
	기 계
감리비	책임감리	295	177	118	‘16.12

□ 예산교부 검토(주차장건설)

○ 사업비 교부 현황(자치단체 자본보조, 단위: 백만원)

구 분	계	‘16년이전	‘17년			‘18년~	비고
			계	기교부	금회교부
계	6,001	1,955	2,618	-	2,618	1,428
시 비	3,601	1,173	1,000	-	1,000	1,428
구 비	2,400	782	1,618	-	1,618	-

□ 요청 사유

○ ‘16.12월 착공되어 공사 시행중으로(현재 CIP작업 및 차수벽 시공중) 부족 공사비 추가확보를 위해 금년도 시비 예산 교부 요청

□ 검토 및 조치의견

○ 도시계획시설(주차장) 결정 관련 자치구, 교육청 협의완료되어 ‘17.5월 시설결정 예정으로

○ 주차장 건설공사가 원활하게 이루어질 수 있도록 금년 시비(10억) 교부코자 함

붙임   관련공문 1부.   끝.