문서번호	원무과-7628
결재일자	2017.4.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관	시설팀장	원무과장
차혁진	조선행	04/27 김종환

서북병원 BL3 실험실 구축공사

폐기물처리 용역 준공보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 4.

서울특별시 서북병원

[원무과]

서북병원 BL3 실험실 구축공사 폐기물처리 용역 준공보고

우리병원 BL3 실험실 구축공사에 따른 건설폐기물 등을 친환경적으로 적정하게 처리하고 그 결과에 따라 용역준공 처리하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서북병원 BL3 실험실 구축공사 폐기물처리 용역

○ 계 약 자 : 협신자원(주) 대표 오원석

○ 계약금액 : 금6,029,200원(금육백이만구천이백원)

○ 계약일자 : ‘16.12.07.

○ 준공기한 : ‘17.04.22.

□ 용역결과

○ 당초 설계상 계획대비 실처리 물량 및 기간변경

종 류	설계물량	실 처리물량	비 고
합 계	101.646톤	132.41톤
건축폐자재	93.959톤	23.77톤
혼합건설폐기물	7.687톤	108.64톤	소각 5%이하
유리솜 보온재	80M	-
고무발포 보온재	120M	-
닥트보온폐기물	338㎡	-

- 당초 물량설계 대비 철거 및 처리과정에서 폐기물의 형상구분이 곤란함

- 덕트 및 각종 배관 보온재 등 혼재하고 물량이 거의 없어 혼합처리

- 당초 준공기한이 ‘17.2.25까지 였으나 BL3 실험실 구축공사 기간에 맞추어 ’17.4.22까지로 연장(원무과-5792, ‘17.3.31)

- 당초 준공기한(‘17.2.25)후 31일 경과한 ’17.3.30일 폐기물처리 용역 계약기간 변경요청이 있어 지체배상금 467,263원 부과함

- 계약기간 변경내용

구분	변경전	변경후	증 감	비 고
금액	6,029,200원	좌 동	없 음	사후정산
기간	‘16.12.8. ~ ’17.2.25	‘16.12.8. ~ ’17.4.22	기간연장	계약기간 만료일 31일 경과후 변경신청으로 지체배상금 467,263원 부과 및 준공시 상계
사유	BL3 실험실 구축공사 계속 추진중으로 공사기간(‘17.4.22까지)과 폐기물처리 용역기간을 일치시킴

- 지체배상금 467,263원은 준공금에서 상계처리 함

○ 준공금액 산정

종 류	설계/견적가	처리량/계약가	준공금액	비고
총 계			5,792,072원	견적가 대비 계약단가 95% 적용 계약 6,029,200원 발주 6,346,550원
부가세			526,603원
합 계		132.41톤	5,266,036원
건축폐자재	93.959톤/30,855원	23.77톤/29,312원	696,746원
혼합건설폐기물	7.687톤/44,273원	108.64톤/42,059원	4,569,290원
유리솜 보온재	80M	-
고무발포 보온재	120M	-
닥트보온폐기물	338㎡	-

- 준공금액 금5,792,072에서 지체배상금 금467,263원 상계하고 원단위 절사하여 총 5,324,800원 준공금 지급

□ 향후계획

○ 서북병원 BL3 실험실 구축공사 폐기물처리 용역 결과에 따라 대가 금5,324,800원 지급

따로붙임	1. 서북병원 폐기물처리 내역 12부.

2. 서북병원 BL3 실험실 구축공사 폐기물처리 용역 계약변경 시행 1부.

3. 서북병원 BL3 실험실 구축공사 폐기물처리 용역 기간변경 검토보고 1부.

4. 폐기물처리 용역 계약기간 변경요청 및 합의각서 2부.  끝.