문서번호	설비부-3546
결재일자	2014.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
이호기		이달영	04/03 박기형
협조	환경시설과장		代송민영
	주무관		송민영

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

건설폐기물 추가발생 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  04.

도시기반시설본부

설비부

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

건설폐기물 추가발생 설계변경 검토 보고

「서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업」과 관련하여 건설폐기물 추가발생에 따른 감리단이 제출한 실정보고 사항에 대한 검토 보고임.

1		용역개요

▢ 용 역 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 건설폐기물처리용역

▢ 용역규모 : 폐아스콘 2,715톤, 폐콘크리트 22,652톤, 건설폐재류 721톤

▢ 용역비 및 용역기간

구 분	총 차	1 차	2차	장래	비 고
용역금액	468,614,000	86,435,000	4,330,000	377,849,000
용역기간	‘12.11.15 ~’15.1.31	‘12.11.15 ~’13.6.30	착수일 ~‘15.1.31

▢ 용 역 사 : 호람산업개발(주)

▢ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링 외1

2		관련근거

▢ 도화(감리) 2014-215(2014.04.01) : 폐기물 추가발생에 따른 실정보고

3		설계변경 내용

▢ 실정보고 내용

- 세륜시설 운영에 따른 건설오니 발생

- 공사차량 운행을 위한 임시 통행로 정비로 인한 건설폐토석 발생

- 공사추진에 따라 추가로 발생되는 폐기물로서 비확정 수량으로 설계에

미반영 됨

▢ 주요 변경내용

- 추가발생 물량

구 분	당초	변경	증감	비고
건설오니	-	30 ton	증) 30 ton	물량변경
건설폐토석	-	30 ton	증) 30 ton

- 폐기물 처리비용

구 분		당 초		변 경		증,감		비 고
		수량 (ton)	금액 (천원)	수량 (ton)	금액 (천원)	수량 (ton)	금액 (천원)
폐기물 처리비	건설오니	-	-	30	633,600	30	633,600
	건설폐토석	-	-	30	582,900	30	582,900
폐기물 운반비	건설오니	-	-	30	177,390	30	177,390
	건설폐토석	-	-	30	162,180	30	162,180
공급가액		-	-	-	1,555,455	-	1,555,455	절사 615
부가가치세		-	-	-	155,545	-	155,545
총계약금액		-	-	-	1,711,000	-	1,711,000

※ 단가적용 : 품셈산출, 견적, 폐기물협회 등 최저 조사단가에 낙찰율 적용

4		보고자 의견

○ 책임감리원 검토의견과 같이 건설오니 및 건설폐토석은 공사추진에   따라 추가로 발생되는 폐기물로서 정확한 수량 산출이 불가하므로    추정수량 반영 후 정산하는 것이 타당한 것으로 사료됨.

○ 우선, 실정보고 승인하여 추후 설계변경에 반영토록 하고, 관할구청에   폐기물처리계획 변경신고 진행코져 합니다.

붙임 : 1. 책임감리원 검토의견서 1부.

2. 설계서 1부.   끝.