투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	시설공사 설계변경(전체4회, 제3차2회) 계약 요청(남부순환로~오정대로간)

우리본부에서 시행 중인 『남부순환로~오정대로간 도로개설공사』의 설계변경 (전체4회, 제3차2회)에 따른 변경계약을 요청합니다.

1. 공 사 명 : 남부순환로~오정대로간 도로개설공사

2. 공사위치 : 강서구 방화로 ~ 부천시 오정대로 삼거리

3. 공사규모 : 도로개설 폭8차로,  연장1.23km

4. 공사기간 : 2010. 9.29 ~ 2014.10. 7(전체)

2013.10. 8 ~ 2014.10. 7(3차)

5. 계 약 자 : 보훈종합건설(주)  송계점

6. 예산과목 : 도로건설, 간선도로망확충(교통사업특별회계), 남부순환로~오정대로간 도로개설(교통개선분담금), 시설비 및 부대비, 시설비 (401-01) (3차 : 2013년 사고이월비)

7. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 / 감	비 고
전체4회	공사비	12,633,500,000	12,897,197,000	263,697,000
	도급비	9,766,680,000	9,999,900,000	233,220,000	내역변경
	관급비	2,866,820,000	2,897,297,000	30,477,000	수량변경
제3차2회	공사비	3,920,425,810	3,920,425,810	0
	도급비	3,493,075,810	3,026,540,000	감)466,535,810	내역변경
	관급비	427,350,000	893,885,810	466,535,810	수량변경

- 공사기간 : 변경없음

- 변경사유 : 현장여건 변동에 따른 물량 증감 사항 설계 반영

첨부 : 1. 보고서 1부.

2. 변경설계서 내역서 (전체4회, 3차2회) 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정문수		광역도로과장	代조양연		토목부장	전결 04/03 노우성
협조자	계약1팀장	김점선
시행	토목부-6390	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길15 2동3층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2561	/전송	02-3708-2599	/	msjeong13@seoul.go.kr	/	대시민공개